송포 도시첨단산업단지 조성 및 MICE산업 육성

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
2-7		○			○		○		○
주관부서	산단관리과(산단조성팀)				협조부서 (협조기관)		문화관광과

□ 목    적

◦ 해양․항공산업 관련 인프라 조성

◦ 항공, 해양분야 등 전략산업 인프라와 문화, 관광, 레저, 교육 등을

연계하여 고부가가치 MICE산업으로 육성

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 송포·노룡동 앞 공유수면 일원

◦ 사업기간 : 2017. ~ 2022.

◦ 사업내용 : 937,341㎡

- 경량항공기 생산·연구 및 교육·훈련단지 조성

- 첨단부품소재 산업단지 조성

- 위그선·수상비행기 R&D센터 구축, 이착륙장 L=1.2km  B=60m

- 호텔·컨벤션센터·상업 및 업무 등 복합타운 조성

- 해양·항공 레저 및 체험단지 조성

◦ 소요사업비 : 161,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6	임기후
계	161,600	200	4,000		39,000	40,000	78,400
국 비	4,600						4,600
도 비
시 비	87,000	200	4,000		19,000	20,000	43,800
지방채	70,000				20,000	20,000	30,000

□ 그 간 추진사항

◦ 2014.  7.    : 민선6기 시장 공약사업

◦ 2016.  4. 28. : 송포 산단 일원 사천시 제2차 연안관리지역계획 고시

◦ 2016. 11. 28. : 항공레저 이착륙장 후보지 확정[국토부 항공정책과]

◦ 2017.  1. 26. : 2017년 산업단지 지정계획 고시(경남도 고시2017-26호)

◦ 2017.  2.  1. : 양해각서 체결[아론비행선박(주)]

◦ 2017.  5. 29. : 2017년 제3차 지방재정 투자사업 타당성 조사 의뢰

◦ 2017.  7. 12. : 양해각서 체결[(주)베셀]

◦ 2018.  8. 12. : 지방재정투자사업 심사 타당성 조사 완료

◦ 2018. 11.  9. : 지방재정 투자심사(행정안전부) - 재검토

□ 추진계획

◦ 2019.  1. : 지방재정 투자심사 재의뢰

◦ 2019.  6. : 투자심사완료 후 산업단지계획 수립 용역 추진

◦ 2020. 12. : 산업단지계획 승인

◦ 2021.  1. ~ : 공사 추진

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6	임기후
송포 도시첨단산업단지 조성 및 MICE산업 육성	타당성 조사 및 지방재정 투자사업 심사	산업단지 계획 수립 용역	산업단지 계획 승인 공사 착공	공사추진	준공

□ 문제점 및 대책

◦ 지방재정 투자심사 결과에 따라 사업추진 여부 결정

→ 지방재정 투자심사 통과 집중 노력

□ 기대효과

◦ 항공산업 관련 인프라 조성

◦ 지역경제 활성화 및 고용창출