서포 굴 특화거리 조성

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
3-1	○				○		○		○
주관부서	해양수산과(수산행정팀)				협조부서 (협조기관)		건축과, 환경위생과

□ 목    적

◦ 서포 비토 굴구이를 활용한 굴 유통 및 신선장상권 구축 등 어민 소득원

재창출

◦ 해안변 무질서 행위(불법 건축물, 무신고 영업) 근절과 제도권 유입을

통한 지역경제 활성화로 청정해역 보존

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 서포면 비토리 30-6번지 일원

◦ 사업기간 : 2018. ~ 2022.

◦ 사 업 량 : 사천만 명품 서포굴 유통복합공간조성 1식(3단지)

◦ 사업내용 : 가공판매 및 처리시설 등(5,987㎡)

◦ 소요사업비 : 1,679백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	임기후
계	1,679		179	300	400	500	300
국 비	750			150	200	250	150
도 비	225			45	60	75	45
시 비	704		179	105	140	175	105
민자 등

□ 그 간 추진사항

◦ 2018. 1. : 서포 비토 해안변 굴구이 양성화 대책 수립

- 불법 굴구이 업소(8개소) 및 굴 박신장(10개소) 적발

- 행정질서 회복을 위해 지도 단속 후 개발계획 수립 시행

◦ 2018. 3. : 사천만 명품 서포굴 유통복합공간조성사업 신청 및 확정(경남도)

- 2019년 지특 사업비 300백만원(국비 150, 도비 45, 시비 105)

◦ 2018. 4. : 국유재산 분할 측량 용도폐지(비토리 259-4/실제사용 운동장)

◦ 2018. 4. : 실시설계 용역비 추경 확보(20백만원)

◦ 2018. 5. : 실시설계 용역 착공(오투건축사/14,832천원/5.17.~ 7.15.)

◦ 2018. 6. 14. : 경계측량 실시 의뢰

◦ 2018. 7. 4. : 측량기간 소요 등으로 설계용역기한 연장(8.14.까지)

◦ 2018. 8. 14. : 실시설계 용역 준공(공사비 350백만원)

- 1단지(165㎡) 계획 : 2종 근린생활시설(일반음식점) 4동, 화장실 1동

◦ 2018. 10. 20. : 국유지 매수신청(한국자산관리공사 경남지역본부)

- 2018년 매각 수입목표 초과로 2019년 초에 매각예정 공문 통보

□ 추진계획

◦ 2019. 1. : 용도 폐지된 국유지(비토리 259-13번지, 278㎡) 매입

◦ 2019. 1. ~ 12. : 1단지 공사 착·준공 및 분양계획 수립 절차 이행

◦ 2020. 1. ~ 12. : 2단지 공사 착·준공 및 분양

◦ 2021. 1. ~ 12. : 3단지 공사 착·준공 및 분양

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월
사천만 명품서포굴 유통복합공간조성	부지확보 및 협의	1단지 착∙준공 및 분양	2단지 착∙준공 및 분양	3단지 착∙준공 및 분양	유지관리 보수 등

□ 문제점 및 대책

◦ 1단지 실시설계 준공에 따른 사업비 350백만원으로 균특 300백만원

사업비 초과분 50백만원(시비) 2019년 당초예산 추가 확보

□ 기대효과

◦ 서포굴 명품화사업과 연계하여 서포굴 브랜드의 전국 인지도 상승

◦ 어촌마을 관광 활성화 도모