‘바다마실, 삼천포 愛 빠지다’차질없는 추진

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
3-16		○			○		○		○
주관부서	도시과(도시재생팀)				협조부서 (협조기관)		문화관광과, 건축과, 해양수산과 녹지공원과, 지역경제과

□ 목    적

◦ 기 선정된 도시재생공모사업을 통하여 자생적 성장기반을 확충하고        도시경쟁력을 제고하며, 지역공동체를 회복하는 등 시민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

◦ 위    치 : 동동 484-18번지 일원

◦ 사업기간 : 2018. ~ 2022.

◦ 사 업 량 : 도시재생사업(중심시가지형) A=291,829㎡

◦ 사업내용

- A-1 ‘블루웨이’통합경관 조성

- A-2  삼천포 전통수산시장 개방공간 조성

- A-3  바다조망테라스 조성          - A-4  방파제 파도공원

- B-1  어시장길 특성화               - B-2  시장지원 거점 조성

- B-3  복합문화공간 조성             - B-4  청년문화에비뉴 조성

- B-5  인포메이션 거점 조성

- C-1  파랑마을 정비사업            - C-2  문화오름 설치

- C-3  삼천포 커뮤니티 에코주차장 조성

- D-1  복합커뮤니티 7004 조성       - D-2  청널공원 주민거점화

◦ 소요사업비 : 30,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	임기후
계	30,000		7,250	7,850	4,970	4,970	4,960
국 비	15,000		4,350	4,710	1,980	1,980	1,980
도 비	3,000		870	942	396	396	396
시 비	12,000		2,030	2,198	2,594	2,594	2,584

□ 그 간 추진사항

◦ 2017. 10. : 도시재생 뉴딜 시범사업 신청서 제출

◦ 2017. 12. : 도시재생 뉴딜 시범사업 선정

◦ 2018. 1. ~ 2. : 도시재생 선도지역 지정 신청을 위한 공청회 및 지방

의회 의견수렴

◦ 2018.  2. 12. : 도시재생선도지역 지정 신청(사천시 → 국토부)

◦ 2018.  5.  8. : 도시재생 선도지역지정 고시

◦ 2018.  5. 10. : 사천시 도시재생 활성화계획(안) 도시계획위원회 심의완료

◦ 2018.  6.  8. : 실현가능성 및 타당성 평가서 국토부 제출(경남도 경유)

◦ 2018.  6. 20. : 활성화계획 승인 신청(사천시 → 국토부)

◦ 2018.  6. 28. : 실현가능성 및 타당성 평가실시(국토부)

◦ 2018.  7. 31. : 활성화계획 승인(국토부 → 사천시)

◦ 2018.  9. 20. : 국도비 보조금 교부 결정

◦ 2018. 11.  5. : 7004복합교류공간 건축공사 발주

◦ 2018. 12.  6. : 7004복합교류공간 건축공사 착공

□ 추진계획

◦ 2019. 1. : A-1‘블루웨이’통합경관 조성사업 용역 발주

◦ 2019. 4. : 7004복합교류공간 건축공사 준공 및 개소식

◦ 2022. 6. : 사업완료

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기후
열린해안 공간재생	용역추진	용역완료	사업추진	사업추진	사업완료
콘텐츠특화 상권재생	용역추진	용역완료	사업추진	사업추진	사업완료
경관마을 주거재생	용역추진	용역완료	사업추진	사업추진	사업완료
마을경제 공동체재생	용역추진	용역완료	사업추진	사업추진	사업완료

□ 기대효과

◦ 쇠퇴도가 심각한 삼천포 일대의 지역 공동체를 회복하는 등 시민의

삶의 질 향상

◦ 도시재생사업을 통한 관광객 유입 및 일자리 창출