영복항 개발사업

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
3-4	○				○			○	○
주관부서	해양수산과(해양레저팀)				협조부서 (협조기관)		문화관광과, 환경위생과, 도시과, 건설수도과, 환경사업소, 하수도사업소

□ 목    적

◦ 시민과 관광객들이 즐겨 찾는 실안지역에 축산업을 주 생업으로 하는

영복원 마을의 축분으로 악취와 해양 오염 등이 발생하고 있어 우리시

관광산업 활성화 도모를 위한 마을 정비가 필요

□ 사업개요

◦ 위    치 : 동서동 영복마을 일원, 실안 산분령~광포 마리나

◦ 사업기간 : 2018. ~ 2023.

◦ 사 업 량

- 어항시설 : 물양장 200m, 선착장 300m

- 마리나시설 : 계류시설 1식, 외곽시설 300m

- 데크길 조성 : L=2.0km

◦ 사업내용 : 관광산업 활성화를 위한 영복항 개발

◦ 소요사업비 : 49,090백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	임기후
계	49,090		170	2,300	5,300	10,320	15,000	16,000
국 비	48,800		64	2,240	5,240	10,256	15,000	16,000
도 비
시 비	290		106	60	60	64
민자 등

□ 그 간 추진사항

〈영복항 개발사업〉

◦ 2017. 8. 7. : 영복항 개발사업 건의를 위한 사전협의(경남도)

◦ 2017. 8. 18. : 사업 건의(해양수산부)

◦ 2017. 9. 25. : 사업 추진계획 보고

◦ 2018. 3. 23. : 사업 재건의(해양수산부)

◦ 2018. 5. 23. : 영복항 개발계획 수립용역 발주

〈실안 산분령~마리나 데크길 조성〉

◦ 2018. 7. : 제3차 연안정비 기본계획 반영 요구(사천시→해양수산부)

□ 추진계획

〈영복항 개발사업〉

◦ 2018. 6. ~ 2019. 1. : 영복항 개발계획 수립용역(기본계획)

◦ 2019. 2. ~ 2019. 12. : 실시설계 등 행정절차 이행

◦ 2020. 1. ~ 2023. 12. : 사업 추진(착·준공)

〈실안 산분령~마리나 데크길 조성〉

◦ 2019. 3. : 행정절차 이행 및 착공(영복항 개발사업과 연계)

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기후
영복원 환경개선사업 (영복원 해양마리나 및 리조트 유치 등)	영복항 개발계획 수립 용역	실시설계 및 행정절차 협의 이행	공사 착공	공사 계속	공사 계속	공사 준공
실안산분령~ 마리나 데크길 조성	실시설계 용역	행정절차 이행 및 착공	사업 추진	사업 완료

□ 문제점 및 대책

〈영복항 개발사업〉

◦ 영복원 환경정비는 육지부 개발(보상 및 시설도입 등)과 해변부 개발

부분으로 구분 추진하여야 할 것으로 대규모 사업비 확보 애로

◦ 따라서 해변부 개발은 해양수산과 추진 검토하고 육지부 개발은 민자       유치는 물론 기반시설별 관계부서 지정 후 시행 추진 검토 필요

〈실안 산분령~마리나 데크길 조성〉

◦ 해수부 연안정비사업추진 방침상 공유수면 매립사업(호안, 도로)불가

◦ 공유수면 점․사용으로 가능한 데크사용사업은 생태복원사업으로 가능

하다는 해수부의 의견으로 데크길 조성사업은 추진 가능

◦ 해수부 해안생태복원사업비 지원 건의

□ 기대효과

◦ 우리시를 찾는 손님들에게 쾌적한 해양환경을 제공

◦ 해안의 연계 개발로 해양관광 시너지 효과 거양

◦ 해양레포츠 단지 개발로 관광산업 활성화 도모