어시장길·서부시장길 교통흐름 개선

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
3-7	○				○		○		○
주관부서	교통행정과(교통지도팀)				협조부서 (협조기관)		도시과, 도로과, 지역경제과

□ 목    적

◦ 어시장길·서부시장길 주변 불법 보도점거 및 주·정차행위 지도단속과       주차장 및 도로 확포장을 통한 교통흐름 개선으로 통행불편 최소화

□ 사업개요

◦ 위    치 : 어시장길, 서부시장길

- 어시장길 : 삼양급수 ∼ 청미복집(500m)

- 서부시장길 : 콜핑 ∼ 청미복집(530m)

◦ 사업기간 : 2018. ∼ 2021.(4개년도)

◦ 사 업 량 : 주차금지 규제블럭 설치 등 7개

◦ 사업내용

- 주차금지 규제블럭 설치 1식

- 에코 주차장 설치 및 삼천포전통수산시장 주차장 확장

- 도시계획도로 확포장(8m → 15m)

- 시내버스 정류소 이전 및 택시 승강장 설치

- 어시장길 보도 확보 등

◦ 소요사업비 : 8,792백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	임기후
계	8,792	1,540	2,972	2,180	1,000	1,100
국 비	2,460		600	600	600	660
도 비	492		120	120	120	132
시 비	5,840	1,540	2,252	1,460	280	308
민자 등

※ 사업별 사업비 세부내역

(단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년
서부시장길(콜핑~청미복집) 주차금지 규제블럭 설치	시비 2		시비 2
수협활어센터~서부주차장 간 도시계획 도로 개설	시비 2,540	시비 1,540	시비 1,000
삼천포전통수산시장 주차장 확장 (서동 318-3, 321-6)	시비 2,130		시비 970	시비 1,160
삼천포커뮤니티 에코주차장 설치	소계 4,100 국비 2,460 도비 492 시비 1,148		소계 1,000 국비 600 도비 120 시비 280	소계 1,000 국비 600 도비 120 시비 280	소계 1,000 국비 600 도비 120 시비 280	소계 1,100 국비 660 도비 132 시비 308
국유지(서동 322-6) 및 주차선 정비, 택시승강장 설치 등	시비 20			시비 20

□ 그 간 추진사항

◦ 2018.  7. : 수협활어센터~삼천포전통시장주차장 간 보상협의

◦ 2018.  7. : 삼천포전통수산시장 주차장 확장 추진(수용재결 추진)

◦ 2018.  7. : 삼천포커뮤니티 에코주차장 활성화계획 승인요청(국토부)

◦ 2018.  7. : 국유지(서동322-6) 및 주차선 정비, 택시승강장 설치

◦ 2018. 11. : 서부시장길 주차금지 규제블럭 설치(사천경찰서 협의, 31개)

□ 추진계획

◦ 2018. 12. : 삼천포커뮤니티 에코주차장 설치 착공

◦ 2018. 12. : 수협활어센터~삼천포전통시장주차장 간 확포장

◦ 2018. 12. : 삼천포전통수산시장 주차장 확장

◦ 2019.  5. : 국유지(서동322-6) 및 주차선 정비, 택시승강장 설치

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월
서부시장길 주차금지 규제 블럭 설치	공사 준공
수협활어센터~서부주차장 간 도시계획도로 개설	토지수용	공사 착공 및 준공
삼천포전통수산시장 주차장 확장	토지수용	공사 착공 및 준공
삼천포커뮤니티 에코주차장 설치	행정절차 이행, 착공			공사 준공
국유지(서동322-6) 및 주차선 정비, 택시승강장 설치 등	협의	공사 착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 주차금지 규제블럭 설치로 인한 물품 승하차 애로 호소

→ 공익 행정에 대한 이해설득 추진, 설치 동의 상점 주변 설치

(교통행정과)

◦ 보상 미협의에 따른 사업 착공 지연

→ 협의 및 수용재결을 통한 신속한 대처(도시과, 지역경제과)

◦ 행정절차 지연에 따른 가시적인 투자효과 미흡

→ 신속한 행정절차 추진(도시과, 지역경제과)

◦ 어시장길 상품 전시형태 개선 및 보행자보도 확보

→ 지속적인 지도 및 단속을 통한 의식개선 추진(도로과)

□ 기대효과

◦ 시설물 정비와 확충을 통한 시내버스 등 대중교통 흐름 개선으로

선진 교통문화 정착

◦ 시민과 관광객에 대한 교통편의 제공, 해양관광도시 이미지 제고