완사천 생태공원 조성 및 생태관광지역 지정

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
5-1	○				○			○	○
주관부서	환경위생과(환경관리팀)				협조부서 (협조기관)		환경부, 도로과, 한국수자원공사

□ 목    적

◦ 완사천 생태공원과 주변 관광자원을 연계한 새로운 관광인프라 구축

◦ 지역주민 삶의 질 향상 및 소득증대, 지속가능한 수변공원 이용체계 확립

□ 사업개요

◦ 위    치 : 곤명면 신흥리, 작팔리 일원

◦ 사업기간 : 2018. ~ 2022.

◦ 사 업 량

- 기존 : 곤명생태학습체험장 16,850㎡, 체육시설/주차장 15,360㎡,

휴식/탐방로 1,960㎡/900m

- 신설 : 부지매입 3,500㎡, 생태관 500㎡, 탐방로 6㎞, 교량 2식,

고사목 제거, 비점오염저감시설 각 1식

◦ 사업내용 : 습지생태공원 조성, 수질개선사업

◦ 소요사업비 : 7,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	임기후
계	7,450	3,300	200	150	500	2,000	1,300
국 비	3,800	1,650	200	150	400	900	500
도 비	1,125	825				150	150
시 비	1,925	825			100	650	350
민자 등	600					300	300

※ 재원 : 국비(환경부, 수계 특별지원사업), 민자(한국수자원공사)

□ 그 간 추진사항

◦ 2014. ~ 2018. : 곤명생태학습체험장 설치 및 정비, 생태탐방로 설치

◦ 2018. 7. : 완사천 수질오염 문제 제기(수계관리위원회)

◦ 2018. 9. : 한국수자원공사 업무협의(점사용 등 관련계획)

◦ 2018. 10. : 낙동강유역환경청 협의(야생생물특별보호구역, 수질개선 관련)

◦ 2018. 11. : 공모사업 제안(완사천 수질오염 및 생태조사:수계위원회)

□ 추진계획

◦ 2018. 12. : 환경부 업무협의(야생생물특별보호구역, 수질개선 관련)

◦ 2019. 2. : 완사천 수질오염 및 생태조사 용역(수계관리위원회)

◦ 2020. 2. : 생태현황 및 타당성조사

◦ 2021. 2. : 편입지 보상, 실시설계 및 착공

◦ 2022. 1. : 착공(생태관, 자전거도로, 탐방로), 생태관광지역 지정신청

◦ 임기후 : 준공, 생태관광지역 지정 신청(환경부)

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기후
완사천 생태공원 조성	업무협의 (수자원공사)	예비조사 (수질/생태)	타당성조사 기본계획수립	편입지 보상 실시설계	착공	준공
완사천 수질개선사업	야생생물 특별보호구역 해지 건의 (환경부)	완사천 수질오염 및 생태조사 (수계위원회)	야생생물 특별 보호구역 해지 (환경부)	비점오염 저감사업 추진	비점오염 저감사업 추진

□ 문제점 및 대책

◦ 야생생물특별보호구역내 행위규제(출입, 석축 등 인위적인 행위 불허)

→ 완사천 하류 야생생물특별보호구역 지정해지 건의(환경부)

◦ 호소수역(수면관리자 : 한국수자원공사)내 수질개선사업 추진 애로

→ 완사천 하류 야생생물특별보호구역지정 해지 후 사업추진

※ 수계기금(수질개선사업) 또는 수면관리자(한국수지원공사)

◦ 국비지원 한계(타당성조사, 기본계획 수립비, 토지매입비 지원 제외)

※ 자연환경보전·이용시설(국·도비 65% 지원)

→ 자체 타당성조사, 기본계획 수립으로 국·도비 지원 및 민자 투자 견인

◦ 수변 및 수면 개발·이용 한계 (수면관리자 : 한국수자원공사)

→ 완사천 수질오염조사(수계관리위원회)후 수질개선사업 추진

□ 기대효과

◦ 지역주민 삶의 질 향상 및 소득 증대

◦ 완사천 자연학습체험 및 지속 가능한 수변공원 이용체계 확립

□ 완사천 생태공원 조성 조감도

기존시설             신규 조성시설          수질오염 개선사업구역