우천 숲 ~ 용소간 산책로 설치

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
5-12	○				○		○		○
주관부서	건설수도과(농업기반팀)				협조부서 (협조기관)

□ 목    적

◦ 지역 주민 및 자연발생 유원지 방문객의 편익 증진

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 사남면 우천리 1502번지 일원

◦ 사업기간 : 2018. ~ 2020.

◦ 사 업 량

- 산책로설치  □ 콘크리트 포장 L=1,120m, B=3.0m

□ 보도교 설치 2개소, 쉼터 6개소

- 지방하천 정비 : L=400m, B=3.0m

◦ 사업내용 : 하천 제방 포장(보도교 설치) 및 지방하천 정비

◦ 소요사업비 : 1,590백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6	임기후
계	1,590			300	1,290
국 비
도 비	500				500
시 비	1,090			300	790
민자 등

□ 그 간 추진사항

◦ 2018.  7. : 현장 확인 조사

◦ 2018.  8. : 2019년 일반하천 정비사업 신청(경상남도)

◦ 2018. 11. : 2019년 일반하천 정비사업 결과 통보(죽천천 연천제 제외)

□ 추진계획

〈우천숲 ~ 용소유원지간 산책로 설치〉

◦ 2019. 1. ~ 3. : 실시설계 용역 추진

◦ 2019. 4. ~ 2020. 12. : 공사 추진

〈죽천천(연천제) 정비〉

◦ 2019. 8. ~ 2020. 12. : 일반하천정비사업 신청

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기후
우천숲~용소간 산책로 설치	실시설계, 공사 착공	공사(계속)	공사 준공
죽천천(연천제) 정비	사업신청	실시설계 및 보상	공사 착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 2019년 신청한 일반하천정비사업(죽천천 연천제) 제외에 따른 도비 미확보

→ 2020년 일반하천정비사업 신청 등 도비 확보에 노력

◦ 산책로 설치 사업비(시비 590백만원) 확보 애로

→ 2020년 농림사업 신청 등 국‧도비 확보에 노력

□ 기대효과

◦ 편익시설 증진으로 지역주민들의 삶의 질 향상

◦ 방문객들의 만족도 증진에 따른 관광 활성화로 주민소득증대에 기여