완사천 지방하천 정비

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
5-13	○			○				○	○
주관부서	건설수도과(하천팀)				협조부서 (협조기관)		경상남도(수자원정책과), 부산지방국토관리청

□ 목    적

◦ 하천 미 개수구간 정비로 홍수 피해 저감 및 사전 재해 예방

◦ 하천개수와 함께 자연과 생물이 되살아나는 시민들이 친숙한 하천 조성

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 곤명면 마곡리 ~ 송림리(완사천 일원)

◦ 사업기간 : 2018. ~ 2024.

◦ 사 업 량 : L=1.3km

◦ 사업내용 : 지방하천 개수(축제 및 보축)

◦ 소요사업비 : 5,089백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	임기후
계	5,089		227		300	1,000	1,000	2,562
국 비	2,658		227		150	500	500	1,281
도 비	2,431				150	500	500	1,281
시 비
민자 등

□ 그 간 추진사항

◦ 2018.  1. : 완사천 하천기본계획 수립용역 착수(부산지방국토관리청)

◦ 2018.  7. : 전략환경영향평가 초안 제출(부산청→낙동강유역청)

◦ 2018.  8. : 주민설명회 개최(곤명면사무소)

◦ 2018. 10. : 완사천 재해예방사업 시행 건의(사천시→경상남도)

◦ 2018. 11. : 완사천 하천기본계획 수립용역 수립 중

□ 추진계획

◦ 2018. 12. : 완사천 하천기본계획 수립용역 준공

◦ 2020.  1. ~ 2021. 1. : 완사천 하천정비 실시설계 완료

◦ 2021.  6. ~ 2024. 12. : 공사 착공 및 준공

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기후
완사천 지방하천 정비	기본계획 용역 착수	기본계획 용역 준공	실시설계 용역 착수	공사 착공	공사 계속	공사 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 하천기본계획(경상남도)이 수립된 하천 중 우선순위에 의거 사업추진

→ 관리청에 사업건의 및 공모사업 등을 통한 우선순위 조정 요청

□ 기대효과

◦ 하천정비로 집중호우시 주택 및 농경지 보호 및 재해예방

◦ 하천의 치수, 이수, 생태기능의 증진 및 쾌적하고 정감어린 하천 조성