농어촌도로 및 마을안길 정비

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
5-14	○				○			○	○
주관부서	도로과(농어촌도로팀)				협조부서 (협조기관)

□ 목    적

◦ 지역 주민숙원사업 해소 및 기반시설 확충

◦ 농수산물의 원활한 수송로 확보

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 관내

◦ 사업기간 : 2009. ~ 2028.

◦ 사업내용 : 도로 확포장 L=4,400m B=3.0m~15.0m

◦ 소요사업비 : 20,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	임기후
계	20,700	2,430	420	350	900	900	500	15,200
국 비
도 비
시 비	20,700	2,430	420	350	900	900	500	15,200
민자 등

□ 그 간 추진사항

◦ 2009.  1. : 실시설계 용역 (침곡 ~ 화전간 도로 확포장)

◦ 2010.  1. ~ 2016. 12. : 보상협의(침곡 ~ 화전간 도로 확포장)

◦ 2017. 10. : 공사 착공(소곡마을 안길 확포장)

◦ 2018.  4. : 공사 착공(사촌 ~ 대산간 도로 확포장)

□ 추진계획

◦ 2018. 12. : 공사 준공(소곡마을 안길 확포장)

◦ 2019.  1. : 실시설계용역 및 보상협의(대곡~풍정간, 침곡)

◦ 2019.  3. : 공사 착공(삼성A옆 도로 확포장)

◦ 2019. 10. : 공사 준공(삼성A옆 도로 확포장)

◦ 2021.  1. ~ 12. : 보상협의 및 공사착공(대곡~풍정간 도로 확포장)

◦ 2021. 12. : 공사 준공(사촌 ~ 대산간 도로 확포장)

◦ 2022.  1. ~ 12. : 보상협의 및 공사착공(침곡마을 안길 확포장)

◦ 2023. 12. : 공사 준공(대곡~풍정간 도로 확포장)

◦ 2024. 12. : 공사 준공(침곡마을 안길 확포장)

◦ 2028. 12. : 공사 준공(침곡~화전간 도로 확포장)

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기후
삼성A옆 도로 확·포장		공사 착공 및 준공
침곡~화전간 도로 확·포장			보상협의	보상협의	보상협의	공사 착공
대곡~풍정간 도로 확·포장		실시설계	보상협의	공사 착공	공사 착공	공사 준공
침곡·소곡 마을안길 확·포장	공사 준공 (소곡)	실시설계 (침곡)	보상협의 (침곡)	보상협의 (침곡)	공사 착공 (침곡)	공사 준공
사촌~대산간 도로 확∙포장	공사 착공	공사 추진	공사 추진	공사 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 추진계획에 따라 사업가능하며 사업비 과다로 기간 장기 소요

◦ 사업비 과다로 예산 확보 애로

→ 침곡 ~ 화전간 도로 확포장 구간 주변에 아파트 건립계획 및 추진 중에 있으며 사업시행자에게 기반시설 설치 부담, 국·도비 예산지원 건의 및 연차적 예산 확보로 사업추진

□ 기대효과

◦ 지역경제 활성화 및 지역발전 도모