사천만 갯벌해양생태 환상형 자전거도로 개설

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
5-15	○				○			○	○
주관부서	도로과(농어촌도로팀)				협조부서 (협조기관)

□ 목    적

◦ 해변도로를 시민과 관광객이 함께하는 테마형 자전거 명품도로 구축

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 관내

◦ 사업기간 : 2019. ~ 2025.

◦ 사업내용 : 자전거도로 개설 및 지정 L=90km

◦ 소요사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	임기후
계	3,000			20	530	500	500	1,450
국 비
도 비
시 비	3,000			20	530	500	500	1,450
민자 등

※ 사천시 둘레길(탐방로 정비) 조성사업 등과 연계하여 국도비 확보

□ 그 간 추진사항

◦ 2018. 7. : 현장 확인

□ 추진계획

◦ 2019. 1. : 실시설계용역

◦ 2020. 1. : 공사 착공

◦ 2025.12. : 공사 준공

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기후
자전거도로 개설		실시설계	공사 착공	공사 계속	공사 계속	공사 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 사업비 과다로 예산 확보 애로

→ 사천시 둘레길 조성사업 등 다른 사업과 연계하여 국도비 확보

□ 기대효과

◦ 관광객 유치 및 지역경제 활성화 도모