신수도 생태관광 자원화

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
5-16	○				○		○		○
주관부서	지역개발과(개발지원팀)				협조부서 (협조기관)		경상남도(서부대개발과)

□ 목    적

◦ 낙후된 도서지역 주민의 소득증대 및 삶의 질 향상

◦ 한려해상의 수려한 관광자원을 활용한 섬 관광 활성화

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 신수동 일원

◦ 사업기간 : 2019. ~ 2022.

◦ 사 업 량 : 관광지 조성 1식, 부잔교 L=280m, 유어장 6개, 탐방로 L=27km

◦ 사업내용 : 신수도 생태관광지 조성

◦ 소요사업비 : 3,428백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	3,428			60	1,526	1,026	816
국 비	2,743			48	1,221	821	653
도 비	342.5			6	152.5	102.5	81.5
시 비	342.5			6	152.5	102.5	81.5
민자 등

□ 그 간 추진사항

◦ 2016. 10. 21. : 제4차 도서종합개발계획(2018~2027년) 사업계획 제출

◦ 2018. 3. 30. : 제4차 도서종합개발계획(2018~2027년) 확정

□ 추진계획

◦ 신수도 부잔교 설치

- 2019. 3. : 실시설계 발주

- 2019. 5. : 실시설계 완료, 행위허가신청(한려해상국립공원관리공단)

- 2019. 6. ~ 2020. 6. : 공사 착공 및 준공

◦ 신수도 유어장 설치

- 2020. 3. : 실시설계 발주

- 2020. 5. : 실시설계 완료, 행위허가신청(한려해상국립공원관리공단)

- 2020. 6. ~ 2021. 6. : 공사 착공 및 준공

◦ 신수도 관광지 조성

- 2020. 3. : 실시설계 발주

- 2020. 9. : 실시설계 완료, 행위허가신청(한려해상국립공원관리공단)

- 2020. 10. ~ 2022. 12. : 공사 착공 및 준공

※ 해양수산부 시행□신수항 친수공간 조성사업□과 연계

(신수동 137-5번지 일원)

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기후
신수도 부잔교 설치		실시설계, 공사 착공	공사 준공
신수도 유어장 설치			실시설계 공사 착공	공사 준공
신수도 관광지 조성			실시설계 공사 착공	공사 계속	공사 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 유어장 설치사업 등 한려해상국립공원구역의 행위허가 어려움

→ 환경부 및 국립공원관리공단과 지속적인 협의 추진

□ 기대효과

◦ 한려해상국립공원 내 위치한 수려한 자연경관을 지닌 신수도를 생태관광지로 조성함으로써 더 많은 관광객 유치

◦ 사천바다 케이블카와 연계하여 즐기고, 먹고, 자고 갈 수 있는 사천관광 이미지 구축

◦ 관광활성화에 따른 지역경제 활성화와 시민의 삶의 질 향상