수양공원 힐링 숲 조성

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
5-6		○			○		○		○
주관부서	녹지공원과(공원팀)				협조부서 (협조기관)

□ 목    적

◦ 시 공원 정비 및 조성을 통한 쾌적한 시민 휴식공간 제공과 시의 관광이미지 제고

◦ 장기미집행 도시공원 해소로 과도한 사유권 제한 등에 따른 민원 해소

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 사천읍 정의리 172번지 일원

◦ 사업기간 : 2018. ~ 2022.

◦ 사 업 량 : 75,511㎡ 중 미조성지 16,016㎡

◦ 사업내용 : 공원부지 매입 및 공원 조성

◦ 소요사업비 : 3,250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6	임기후
계	3,250		210	540	1,000	1,000	500
국 비
도 비
시 비	3,250		210	540	1,000	1,000	500
민자 등

□ 그 간 추진사항

◦ 전체 공원면적 75,511㎡ 중 59,495㎡ 조성(78.8%)

- 수양공원 꽃무릇 등 야생화 식재사업

- 공원 산책로변 비비추 등 초화류 식재사업

- 공원부지 매입 : 2필지 1,081㎡

□ 추진계획

◦ 2018. 12. 31. : 도시과의 ‘도시계획시설 재정비 및 단계별 집행계획

수립 용역’과 연계 단계별 집행계획 반영

◦ 2019. ~ 2021. : 조성대상부분 토지 매입 및 관련 행정절차 이행

◦ 2022. : 공원 조성

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기후
수양공원 힐링 숲 조성	도시계획시설 재정비 및 단계별 집행계획 반영, 토지매입	토지매입	토지매입	토지매입, 행정절차, 실시설계	공사 착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 미조성구역의 대부분이 사찰(달마사) 및 어린이집 소유로 토지매입 애로

◦ 과도한 재원투자로 재정악화 불가피

□ 기대효과

◦ 장기간 소유권 제한 등으로 인한 민원해소

◦ 특색있고 쾌적한 시민 휴식공간 제공과 시의 관광이미지 제고