실안휴양림 종합개발(숙박시설)

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
5-7		○			○		○		○
주관부서	녹지공원과(공원팀)				협조부서 (협조기관)

□ 목    적

◦ 편백림을 시민에게 정서함양과 보전휴양의 장소로 제공

◦ 바다케이블카와 연계한 체류형 관광인프라 구축 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

◦ 위    치 : 실안동 산170-2번지 외 25필지 일원(39.4ha)

◦ 사업기간 : 2018. ~ 2020.

◦ 사업내용

- 숙박시설 : 산림휴양관 3동 6실, 숲속의 집 16동 16실

- 편익시설 : 방문자센터 1동, 야영센터 1동, 관리실 1동, 야영데크 15개소,            야외공연장 1식, 진입로 1식, 주차장 1식 등

- 위생시설 : 상수ㆍ오수시설 1식

- 체험ㆍ교육시설 : 산책로 3km, 숲속놀이터 1식, 숲속교실 1식,

다목적 구장 1개소, 계류탁족장 1개소 등

- 기타 : 전기ㆍ통신ㆍ신재생에너지 시설 등

◦ 소요사업비 ; 6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6	임기후
계	6,500		1,700	3,800	1,000
국 비	2,500		100	1,900	500
도 비	750		30	570	150
시 비	3,250		1,570	1,330	350
민자 등

※ 사천바다 케이블카 자연휴양림 조성사업으로 추진

□ 그 간 추진사항

◦ 2017. 1. 15. : 휴양림 예정지 내 사유지 매입(24필지 177,047㎡) 완료

◦ 2017. 5. 17. : 휴양림 지정 고시(산림청 고시 제2017-48호)

◦ 2017. 7. 31. : 균특사업 반영(2018.~2020.)

◦ 2018. 4. 11. : 휴양림 조성사업 실시설계 완료

◦ 2018. 6. 29. : 휴양림 조성계획 승인(도지사)

◦ 2018. 6. 29. : 국유림 사용허가 신청

□ 추진계획

◦ 2018. 10. ~ 12. : 총괄사업 및 2018년분 사업 발주

◦ 2020. 12. : 휴양림 조성사업 준공

◦ 2021.부터~ : 휴양림 시설(숙박시설 등) 보완

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기후
케이블카 자연휴양림 조성	실시설계, 조성계획 승인 및 사업발주	공사 추진	공사 추진 및 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 본격적인 사업 추진을 위해 휴양림 진입 도시계획도로 개설 시급

□ 기대효과

◦ 시민의 정서함양과 보전휴양 장소 제공

◦ 사천바다 케이블카와 연계한 체류형 관광인프라 구축

◦ 지역민 일자리 제공과 관광객 등 유입으로 지역경제 활성화