노산공원 첨단시뮬레이션 테마파크 투자유치

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
5-9	○					○	○		○
주관부서	녹지공원과(공원팀)				협조부서 (협조기관)		문화관광과, 도시과

□ 목    적

◦ 공원 내 차별화와 특수성이 가미된 시뮬레이션 및 가상ㆍ증강현실을 체험하고 즐길 수 있는 테마공간 조성

◦ 공원이용객에게 다양한 놀이공간 제공 및 휴식수요에 대응

□ 사업개요

◦ 위    치 : 노산공원(서금동 101-1번지) 내

◦ 사업기간 : 2018. ~ 2022.

◦ 사 업 량 : 1식(1,000㎡정도)

◦ 사업내용 : 가상(VR)ㆍ증강(AR)현실 체험 박물관, 전망대, 경관조명 등

◦ 소요사업비 : 45,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6	임기후
계	45,000			10,000	15,000	10,000	10,000
민자 등	45,000			10,000	15,000	10,000	10,000

□ 추진계획

◦ 2018. 12. : 사업내용에 대한 업무연찬 및 사례 파악

◦ 2019. : 업체 공모 및 각종 행정절차 이행

◦ 2020. ~ 2022. : 사업착수ㆍ준공 및 시설 운영

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기후
노산공원 가상현실체험 테마파크 투자유치	투자사업자 제안서 접수 및 공모	행정절차 이행	사업착수	사업추진	준공

□ 문제점 및 대책

◦ 가상(VR) 및 증강(AR)현실 체험시설의 전문지식 절대 부족

– 국내 위주 유사시설 등의 벤치마킹(선진지 견학 등)을 통한 사례 파악

◦ 관련부서별 업무조정 필요

- 문화관광과 : 투자자 선정, 투자협정 체결, 향후 시설운영 등

- 녹지공원과 : 공원부지 제공, 공원조성계획 변경 등

□ 기대효과

◦ 공원 내 독특한 관광시설 조성으로 새로운 즐길거리 창출

◦ 다양한 놀이 및 관광수요 충족으로 시 관광이미지 제고

◦ 신규 관광객 및 이용객 유입으로 지역경제 활성화