다솔사역과 와인갤러리 브랜드사업 및 체험단지 조성

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
6-10	○				○		○		○
주관부서	문화관광과(관광개발팀)				협조부서 (협조기관)		농업기술센터

□ 목    적

◦ 관광객 증가를 위한 다래와인갤러리 관광명소화

□ 사업개요

◦ 사업위치 : 사천시 곤명면 신흥리 다래와인갤러리 일원

◦ 사업기간 : 2019. ~ 2022.

◦ 사업내용 : 다래와인갤러리 내 신규콘텐츠 개발, 다래전망대 설치,

체험시설 및 프로그램 확충, 미니 재배단지 조성, 교통

환경  개선 등

◦ 소요사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	임기후
계	10,000			1,000	1,000	4,000	4,000
국 비
도 비
시 비	10,000			1,000	1,000	4,000	4,000
민자 등

□ 추진계획

◦ 신규콘텐츠 개발

- VR콘텐츠와 트릭아트, 미디어파사드(건물외벽에 LED 조명을 비춰 영상을 표현하는 기법) 등의 다양한 방법을 활용한 신규 콘텐츠를 개발하여 미디어 갤러리 조성

◦ 다래전망대설치

- 다래와인갤러리 주변 구릉지에 사천만 조망 가능한 전망대를 설치하여 볼거리를 제공

◦ 체험시설 및 프로그램 확충

- 와인만들기 체험, 참다래 오감체험 등

◦ 미니 재배단지 조성

- 다래, 포도 등 와인 재료를 소규모 재배하여 와인만들기 체험과 연계

◦ 교통환경 개선

- 관광객의 이동 편익을 위한 도로교통 환경개선 및 안내표지판 정비, 완사교 보도설치로 동선 유도

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월
신규콘텐츠 개발		콘텐츠 개발	미디어갤러리 조성	미디어갤러리 조성	완료
다래전망대 설치			부지선정 실시설계	전망대 설치	완료
체험시설 및 프로그램 확충		프로그램 개발	체험시설 조성	체험시설 운영	완료
미니 재배단지 조성			부지선정 실시설계	재배단지 조성	완료
교통환경 개선				도로 및 안내판 정비, 완사교 보도 설치	완료

□ 기대효과

◦ 가족, 젊은층, 어린이가 모두 즐길 수 있는 복합관광지로 성장

◦ 다래와인갤러리 관광명소화로 완사 지역경제 활성화