국도3호선~금문해안도로간 연결도로 개설

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
6-14		○			○		○		○
주관부서	도시과(도시계획팀)				협조부서 (협조기관)

□ 목    적

◦ 신청사 및 신도시 개발에 따른 연결도로 개설 시급

◦ 지역균형발전 및 도시기반시설 확충

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 용현면 금문리 일원

◦ 사업기간 : L=896m, B=25m

◦ 사 업 량 : 2015. 1. ~ 2022. 12.

◦ 사업내용 : 연결도로 개설 L=896m, B=25m

◦ 소요사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	임기후
계	9,000	1,550	500	500	2,000	2,000	2,450
국 비
도 비	750	750
시 비	8,250	800	500	500	2000	2000	2450
민자 등

□ 그 간 추진사항

◦ 2010. 10.  : 실시설계용역 완료

◦ 2013. 11.   : 투융자 심사

◦ 2015. 9.   : 손실보상협의(1차구간 : 국도3호선~금문마을방향 L=150m)

◦ 2017. 4.  : 손실보상 재산정 (토지 5, 지장물 3, 594백만원)

◦ 2017. 6. ~ 2018. 2. : 지장가옥(5필지) 철거

◦ 2018. 1. ~  : 손실보상협의 계속

□ 추진계획

◦ 2019. 1. : 손실보상 산정 - 재산정분 포함

◦ 2019. ~ 2020. : 편입토지 보상 및 지장가옥 철거

◦ 2021. ~ 2022. : 공사 착공 및 준공

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기후
향촌5길~용강 주공아파트 도로 개설	편입토지 보상	편입토지 보상 및 지장가옥 철거	편입토지 보상 및 지장가옥 철거	공사 착공	공사 준공

□ 기대효과

◦ 용현택지와 금문해안도로를 연결하는 교통망 구축으로 신도시 조성 기반 마련 및 도시기반시설 확충