삼천포시외버스터미널~문화예술회관 도로 확장

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
6-15	○				○		○		○
주관부서	도시과(도시개발팀)				협조부서 (협조기관)

□ 목    적

◦ 동지역 내 시가지를 관통하는 도시계획도로를 확․포장하여 상습적인 차량 정체 해소 및 교통편의 제공

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 벌리동 일원

◦ 사업기간 : 2016. ~ 2022.

◦ 사 업 량 : 도로개설 L=280m, B=20m

◦ 사업내용 : 수도교~벌리신호등간 도시계획도로(중로1-12호선) 개설

◦ 소요사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	임기후
계	8,000	100	300	1,000	2,500	2,500	1,600
국 비
도 비
시 비	8,000	100	300	1,000	2,500	2,500	1,600
민자 등

□ 그 간 추진사항

◦ 실시설계 완료 : 2017. 5.

◦ 실시계획인가 : 2018. 1.

□ 추진계획

◦ 손실보상 협의 : 2018. 8. ~ 2020. 6.

◦ 공사 추진 : 2020. 7. ~ 2022. 6.

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기후
수도교~벌리신호등 간 도시계획도로 개설	보상 착수	보상협의 (계속)	보상협의 완료, 공사 착공	공사 추진	공사 준공

□ 기대효과

◦ 차량 상습정체지역의 교통난 해소

◦ 도시기반시설 확충