시도1호선 확장사업 본격 시행

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
6-17	○				○		○		○
주관부서	도로과(도로계획팀)				협조부서 (협조기관)

□ 목    적

◦ 이용객의 편익 증대 및 교통혼잡 해소를 위한 도로 확장

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사남면 LIG 삼거리 ~ 남양동 주민센터 일원

◦ 사업기간 : 2018. ~ 임기후

◦ 사 업 량 : 도로 확·포장 L=8.42㎞

◦ 사업내용 : 시도1호선 확포장

◦ 소요사업비 : 80,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	임기후
계	80,000		500	5,000	5,000	5,000	5,000	59,500
국 비
도 비
시 비	80,000		500	5,000	5,000	5,000	5,000	59,500
민자 등

□ 그 간 추진사항

◦ 2018. 7. : 시도1호선 확포장공사 추진계획 보고

◦ 2018. 11. : 용역업체 선정

□ 추진계획

◦ 2019.  9. : 기본 및 실시설계 완료

- 구간별 우선 사업시행 구간 선정

◦ 2019. 10. : 보상 추진(시도1호선 확장 본격 시행)

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기후
시도1호선 확장 사업 본격 시행	기본 및 실시설계	설계완료 행정절차 이행 및 보상	보상 및 구간별 공사추진	보상 및 구간별 공사추진	보상 및 구간별 공사 추진 ※ LIG삼거리~ 죽천교 구간 완료	확장 완료

□ 문제점 및 대책

◦ 시도1호선 전 구간 동시 확장은 막대한 사업비 소요되므로 추진 애로

→ 실시설계 후 구간별 확장 추진

□ 기대효과

◦ 시도1호선 확장 및 선형 개량으로 이용객 편익 증대 및 안전사고 예방

◦ 기반시설 확충 및 지역균형발전