농촌중심지 활성화사업

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
6-21		○			○		○		○
주관부서	지역개발과(농촌개발팀)				협조부서 (협조기관)		경상남도(농업정책과)

□ 목    적

◦ 정주서비스 기능 충족과 중심거점 공간 육성으로 주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천읍, 용현면, 곤명면 일원

◦ 사업기간 : 2016. ~ 2021.

◦ 사업내용 : 기초생활기반 확충, 지역경관 개선, 지역역량 강화

◦ 소요사업비 : 19,197백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	임기후
계	19,197	3,099	2,947	7,205	4,758	1,188
국 비	13,438	2,170	2,062	5,044	3,330	832
도 비	1,727	278	266	648	428	107
시 비	4,032	651	619	1,513	1,000	249
민자 등

※ 사업별 사업비 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	총계		기투자		2018년		2019년		2020년		2021년
총계	19,197		3,099		2,947		7,205		4,758		1,188
사천읍 농촌중심지 활성화사업	소계	8,000	소계	725	소계	1,076	소계	3,100	소계	3,099	소계
	국비	5,600	국비	508	국비	753	국비	2,170	국비	2,169	국비
	도비	720	도비	65	도비	97	도비	279	도비	279	도비
	시비	1,680	시비	152	시비	226	시비	651	시비	651	시비
용현면 농촌중심지 활성화사업	소계	5,797	소계		소계	420	소계	2,880	소계	1,309	소계	1,188
	국비	4,058	국비		국비	294	국비	2,016	국비	916	국비	832
	도비	522	도비		도비	38	도비	259	도비	118	도비	107
	시비	1,217	시비		시비	88	시비	605	시비	275	시비	249
곤명면 농촌중심지 활성화사업	소계	5,400	소계	2,374	소계	1,451	소계	1,225	소계	350	소계
	국비	3,780	국비	1,662	국비	1,015	국비	858	국비	245	국비
	도비	485	도비	213	도비	131	도비	110	도비	31	도비
	시비	1,135	시비	499	시비	305	시비	257	시비	74	시비

□ 그 간 추진사항

〈사천읍 농촌중심지 활성화사업〉

◦ 2017. 9. : 2018년도 일반농산어촌개발 신규사업 선정

◦ 2018. 4. 26. : 기본계획 수립 고시

◦ 2018. 6. 4. : 시행계획 수립 용역 착수

◦ 2018. 9. : 위탁 시행 협약 체결(한국농어촌공사 사천지사)

〈용현면 농촌중심지 활성화사업〉

◦ 2017. 9. : 2018년도 일반농산어촌개발 신규사업 선정

◦ 2018. 3. 30. : 위․수탁 협약 체결(한국농어촌공사 사천지사)

◦ 2018. 6. : 기본계획 수립 용역 착수

〈곤명면 농촌중심지 활성화사업〉

◦ 2017. 3. 16. : 기본계획 수립 고시

◦ 2018. 5. 4. : 기본계획 변경 수립 고시

◦ 2018. 6. 7.(※ 6.26. : 결과보고- 경남도) : 시행계획 수립 고시

◦ 2018. 7. 16. : 총괄분 및 2018년분 계약 의뢰(삭제)

◦ 2018. 8. : 공사 착공

□ 추진계획

〈사천읍 농촌중심지 활성화사업〉

◦ 2018. 12. :  시행계획 수립 고시

◦ 2019. 2. :  공사 착공

◦ 2020. 12. : 공사 준공

〈용현면 농촌중심지 활성화사업〉

◦ 2018. 12. : 기본계획 수립 고시

◦ 2019. 12. : 시행계획 수립 고시

◦ 2020. 1. : 공사 착공

◦ 2021. 12. : 공사 준공

〈곤명면 농촌중심지 활성화사업〉

◦ 2020. 12. : 사업 준공

□ 연도별 추진목표

세부사업명		2018년	2019년	2020년	2021년
사천읍 농촌중심지 활성화사업	사천활력거점센터	시행계획 수립	공사 착공	공사 준공
	다어울림센터 조성	〃	〃	〃
	지역공동체 놀이터, 수양공원	〃	〃	〃
	Wing-Wing 특화거리	〃	〃	〃
용현면 농촌중심지 활성화사업	길쌈두레문화관	기본계획 수립·고시	시행계획 수립·고시	공사 착공	공사 준공
	얼쑤한마당 조성	〃	〃	〃	〃
	중심가로 환경정비	〃	〃	〃	〃
	송지천 수변산책로 조성	〃	〃	〃	〃
	오동지 교류센터	〃	〃	〃	〃
	마을회관 조성	〃	〃	〃	〃
곤명면 농촌중심지 활성화사업	다솔문화센터	공사 착공		공사 준공
	녹차공원	〃		〃
	공동생활 홈	〃		〃
	배후마을 연결도로 정비	〃		〃
	중심가로 경관정비	〃		〃
	김동리 산책로 정비		공사 착공	〃
	봉명로 경관도로 조성		〃	〃
	생태하천 정비		〃	〃

□ 문제점 및 대책

◦ 해당없음

□ 기대효과

◦ 주민들의 문화․복지 서비스기능 강화

◦ 주민역량 및 유대강화를 통한 지역공동체 재생