삼천포 구 역사 주변 택지 분양 및 공동주택 건립

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
6-23		○				○	○		○
주관부서	지역개발과(개발지원팀)				협조부서 (협조기관)		건축과

□ 목    적

◦ 삼천포 구 역사부지의 계획적이고 체계적인 개발을 통해 토지의 이용 효율 증대와 난개발 방지로 상업 중심지의 이미지 제고

◦ 기반시설 확충 및 상업부지 개발을 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

◦ 위    치 : 동금동 151-5번지 일원

◦ 사업기간 : 2016. ~ 2022.

◦ 사 업 량 : 주상복합(아파트)신축 및 1호광장 조성(A=25,374㎡)

◦ 사업내용 : 택지분양 및 공동주택 건립

◦ 소요사업비 : 9,000백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	총계	기투자	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	9,000	9,000
국 비
도 비
시 비	9,000	9,000
민자 등

□ 그 간 추진사항

◦  2016. 09. 09 : 대지조성사업 승인․고시

◦  2017. 01. 25. : 도유재산 9필지(9,310㎡) 매입 완료

◦  2017. 07. 28. : 국유지(40필지) 매입 완료

◦  2017. 12. 22. : 토지수용 완료(6필지 1,368㎡)

◦  2017. 12. 29. : 분양공고문 공고(`17.12.29 ~ `18.2.27.)

◦  2018. 01. 15. : 조성원가 산정, 분양공고문 변경 공고(‘18.1.15 ~’18.3.16.)

◦  2018. 01. 05. : 사업설명회 개최

◦  2018. 01. 26. : 공모참가 의향서 접수

◦  2018. 03. 16. : 공모사업 계획서 접수(신청자 없음, 유찰)

◦  2018. 04. 10. : 주요정책토론회 개최(재공고안 심의)

◦  2018. 04. 18. : 택지분양 및 민간사업자 공모 재공고(‘18.4.18 ~‘18.7.16.)

◦  2018. 07. 16. : 사업계획서 접수(신청자 없음, 유찰)

◦  2018. 07. 24. : 민간사업자 미 참여에 따른 사업추진 잠정적 유보(방침 결정)

□ 추진계획

◦  2020. 01. : 사업 재추진

□ 기대효과

◦ 사천시 동 지역의 새로운 랜드마크 구축으로 사천시 이미지 향상

◦ 사천바다케이블카 및 도시재생사업과 연계하여 관광객의 주상복합아파트 상가쇼핑 유도를 통한 지역경제 활성화

◦ 대형 주상복합아파트 건립으로 인한 주변 상업지역의 연계 발전