검정·중항지구 일반산업단지 조성

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
6-24	○				○			○	○
주관부서	산단관리과(산단조성팀)				협조부서 (협조기관)

□ 목    적

◦ 항공산업 수요에 부응하는 산업단지 조성으로 항공집적 클러스트 발전

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 곤양면 중항리 일원

◦ 사업기간 : 2020. ~ 임기후

◦ 사업내용 : 1,700,000㎡

◦ 유치업종

- 기타 기계 및 장비 제조업(C29)

- 기타 운송장비 제조시설(C31)

◦ 소요사업비 : 270,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	270,000				200	5,000	20,000	244,800
국 비
도 비
시 비	135,000				200	5,000	10,000	119,800
지방채	135,000						10,000	125,000

□ 그 간 추진사항

◦ 2016.  5. 11. : 2030 사천 도시기본계획 승인(공업용지 7.62㎢ 확보)

◦ 2018.  1. 19. : 사천 항공클러스터 확충을 위한 연결도로 구축사업

기본구상 용역착수(산업단지 기본구상 포함)

산업단지명	위 치	면적(㎡)	사업비(백만원)	추진상황
계	6개 지구	2,901,107	552,200
향촌2	향촌동	68,661	31,000	공사 중
용당 MRO	사천 용당	304,644	150,000	보상 및 산단 계획수립중
송포첨단	송포동	937,341	160,000	타당성조사 중
서부산단	곤양 서정	387,816	33,200	투자심사 완료
사천항공	축동 구호	991,895	130,000	국유지 협의 중
선진산단	용현 선진	210,750	48,000	산단지정계획 검토중

◦ 2018.  6월말 기준 산업단지 추진현황

□ 추진계획

◦ 2020. 1. ~ : 타당성 검토 등 행정절차 이행

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기후
검정·중항지구 일반산업단지 조성		타당성 검토	투자심사, 산업단지계획 수립	산업단지계획 승인	공사추진

□ 문제점 및 대책

◦ 향촌2일반산업단지 외 5개소(용당MRO, 송포첨단, 서부산단, 사천항공,

선진산단) 산업단지를 추진(2,901,107㎡ 5,522억원)중으로 시비 및

지방채 부담 가중

→ 주변 산업단지 추이를 감안하여 향후 타당성 검토 등 행정절차 이행

□ 기대효과

◦ 낙후된 사천 서부지역 기업 유치로 지역 일자리 창출 및 동·서간        균형개발 기여