향촌지역 일반산업단지 조성 계획 수립

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
6-25	○				○			○	○
주관부서	산단관리과(산단조성팀)				협조부서 (협조기관)

□ 목    적

◦ 중장기 계획에 따라 지역의 특성과 역량에 맞는 산업단지 조성을

통하여 지역 균형 발전과 지역경제 활성화

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 향촌동 일원

◦ 사업기간 : 2021. ~ 임기후

◦ 사업내용 : 780,000㎡

◦ 유치업종 : 기타 기계 및 장비 제조업(C29),

기타 운송장비 제조시설(C31)

◦ 소요사업비 : 210,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
계	210,000					200	3,000	206,800
국 비
도 비
시 비	105,000					200	3,000	101,800
지방채	105,000							105,000

□ 그 간 추진사항

◦ 2016.  5. 11. : 2030 사천 도시기본계획 승인(공업용지 7.62㎢ 확보)

◦ 2018.  6월말 기준 산업단지 추진현황

산업단지명	위 치	면적(㎡)	사업비(백만원)	추진상황
계	6개지구	2,901,107	552,200
향촌2	향촌동	68,661	31,000	공사 중
용당 MRO	사천 용당	304,644	150,000	보상 및 산단 계획수립중
송포첨단	송포동	937,341	160,000	타당성조사 중
서부산단	곤양 서정	387,816	33,200	투자심사 완료
사천항공	축동 구호	991,895	130,000	국유지 협의 중
선진산단	용현 선진	210,750	48,000	산단지정계획 검토중

□ 추진계획

◦ 2021. 1. ~  : 타당성 검토 등 행정절차 이행

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기후
향촌 일반산업 단지 조성			타당성 검토	투자심사, 산업단지계획 수립	산업단지계획 승인, 공사추진

□ 문제점 및 대책

◦ 향촌2일반산업단지 외 5개소(용당MRO, 송포첨단, 서부산단, 사천항공,       선진산단) 산업단지를 추진(2,901,107㎡ 5,522억원)중으로 시비 및

지방채 부담 가중

→ 주변 산업단지 추이를 감안하여 향후 타당성검토 등 행정절차 이행

□ 기대효과

◦ 지역의 특성과 역량에 맞는 기업 유치로 지역 경제 활성화 및 지역

균형  발전 도모