사남 고압 송전선로 지중화 사업

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
6-28	○				○			○	○
주관부서	지역경제과(에너지팀)				협조부서 (협조기관)		한국전력공사(경남지역본부)

□ 목    적

◦ 사남면 월성리 ~ 화전리 간 고압송전선로가 인근 아파트 및 마을을

통과하고 있어 인체 유해성 및 도시 미관 저해, 지역 개발 저해 등

인근 주민들에게 피해를 주고 있어 고압 송전선로 지중화로 민원 해소

코자 함

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 사남면 월성리 ~ 화전리 일원

◦ 사업기간 : 2018. ~ 2022.

◦ 사 업 량 : L=2.9km, 15,000볼트 4회선 철탑 12기 지중화

◦ 사업내용 : 철탑 12기 지중화 사업

◦ 소요사업비 : 44,700백만원(※ 한전 추정액임)

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	임기후
계	44,700				2,000	4,000	8,000	30,700
국 비
도 비
시 비	22,400				1,000	2,000	4,000	15,400
민자(한전)	22,300				1,000	2,000	4,000	15,300

□ 그 간 추진사항

◦ 2018. 2. 28. : 2018년도 시민과의 대화 주민 건의사항(접수)

◦ 2018. 5. 31. : 사남 송전선로 지중화 사업 타당성 및 기본계획 수립용역 착수   ◦ 2018. 7. 26. : 고압선로 지중화 사업 업무 협의(한국전력 경남지역본부)

◦ 2018. 9. 21. : 사남 송전선로 지중화 사업 타당성 및 기본계획 수립용역 준공

□ 추진계획

◦ 2019. 2. ~ 3. : 고압선로 지중화 사업 협의(한국전력 경남지역 본부)

◦ 2019. 4. ~ 12. : 지중화 사업 국 ‧ 도비 사업비 확보 방안 협의 및 검토

□ 연도별 추진목표

(단위 : 백만원)

세부사업명	구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
사남 고압 송전선로 지중화	추진목표	타당성 및 기본계획 수립	국·도비 확보방안 마련 및 한전 협의	국·도비 및 시비 확보	사업추진여부 결정 및 실시설계	사업 착공
	사업비			2,000	4,000	8,000

□ 기대효과

◦ 고압선로 지중화로 도시미관 저해 해소 및 지역 개발 활성화

◦ 주민 숙원사업 해결로 민원 해소