가산오광대 전수관 정비

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
6-6	○				○		○		○
주관부서	문화관광과(문화재팀)				협조부서 (협조기관)

□ 목    적

◦ 불필요한 행정재산을 적극 매각하여 관리 유지에 따른 부담 경감

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 축동면 가산리 830-2번지 외 1필지

◦ 사업기간 : 2018. ~ 2020.

◦ 사 업 량 : 건축물 2동 철거, 주변정비

◦ 사업내용 : 가산오광대 전수관 철거 및 주변정비 1식

◦ 소요사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	임기후
계	100				100
국 비
도 비
시 비	100				100
민자 등

□ 그 간 추진사항

◦ 2014. ~ 2016. 4. : 사천 무형문화재 전수교육관 신축

◦ 2016. 7. : 가산오광대 보존회 이전 완료

□ 추진계획

◦ 2019.  2. : 행정재산 용도폐지

◦ 2019.  6. : 공유재산 매각심의

◦ 2019. 8. ~ 2019. 12. : 행정재산 매각

◦ 2020. 1. ~ 5. : 매수자 없을 시 철거

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기후
가산오광대 전수관 정비	공유재산 매각심의	매각	철거

□ 문제점 및 대책

◦ 도심지와 떨어져 있어 접근성이 떨어지고 고속도로 아래로 진입로가

있어 대형 차량 진입이 어려움

◦ 건축물 규모(475.22㎡)가 커 1개 단체에서 활용하기 어려움

□ 기대효과

◦ 장기 미사용 행정재산을 매각하여 관리 유지에 따른 시 부담 경감

◦ 건축물의 방치에 따른 화재, 사건, 사고 가능성 방지