세종․단종 태실지 정비

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
6-8		○			○		○		○
주관부서	문화관광과(문화재팀)				협조부서 (협조기관)

□ 목    적

◦ 조선 성군 세종과 비운의 임금 단종의 태실이 일제에 의해 훼손된

이후 복원되지 못하고 있어 이에 대한 대책 마련

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 곤명면 은사리 산27번지외 1필지

◦ 사업기간 : 2019. ~ 2022.

◦ 사 업 량 : 태실 복원 2개소 및 주변 정비

◦ 사업내용 : 훼손된 태실 2개소 복원, 기념관 신축

◦ 소요사업비 : 1,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	임기후
계	1,800				1,000	500	300
국 비
도 비
시 비	1,800				1,000	500	300
민자 등

□ 그 간 추진사항

◦ 2009. : 단종태실지 친일재산환수 조사 → 부결

◦ 2012. : 세종단종태실지 국가지정문화재 승격 기본계획 수립

□ 추진계획

◦ 2020. 2. ~ 12. : 세종단종태실 기념관 건립(은사리 150-2번지)

◦ 2021. ~ 계속 : 태실지 복원을 위한 토지매입 협의 및 복원공사

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기후
세종단종 태실지 정비			기념관 건립	토지매입 협의	태실지 복원

□ 문제점 및 대책

◦ 기존 진입로 확포장을 위해서 사유지 매입이 필요하나 현재 원태실지        자리에 분묘를 조성한 사람의 토지로써 협의에 애로가 예상됨

→ 국토부와 협의하여 하천변을 이용하는 방법 함께 검토

◦ 원태실지 위치에 복원을 하기 위해서는 분묘이전과 토지매입이 필수       이나 지난 몇 년간 방송과정에서 접촉한 결과 부정적임

→ 국회의원을 통한 문화재보호법 개정을 통한 토지수용 강구

□ 기대효과

◦ 매향비, 배방사지와 연계하여 우리지역이 풍패지향임을 널리 홍보

◦ 진입로와 기념관 건립을 통해 관광객 볼거리 제공