배방사지 종합 정비 계획 수립

관리번호	사업성격		사업주체				완료시기		예산구분
	신규	계속	국가	도	시	민자 등	임기내	임기후	예산	비예산
6-9		○			○			○	○
주관부서	문화관광과(문화재팀)				협조부서 (협조기관)

□ 목    적

◦ 고려8대 임금 현종이 유년시설을 보냈던 배방사지를 종합정비, 복원

하여 풍패지향으로서의 면모를 갖추고 우리 고장의 유수한 역사를

널리 알려 지역민들의 자긍심을 고취

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 정동면 장산리 98번지 일원

◦ 사업기간 : 2015. 8. ~ 임기후

◦ 사업내용 : 배방사지 발굴조사 ․ 복원 등 종합 정비

◦ 소요사업비 : 6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6.	임기후
계	6,500	100		200	1,000	1,000	1,000	3,200
국 비	3,640					700	700	2,240
도 비	546					105	105	336
시 비	2,314	100		200	1,000	195	195	624
민자 등

□ 그 간 추진사항

◦ 배방사지 종합정비계획 수립 용역 완료

□ 추진계획

◦ 2018. 12. ~ 3. : 시굴조사를 위한 토지소유자 동의서 징구

◦ 2019. 4. : 제1회 추경 시굴조사 예산 확보

◦ 2019. 5. ~ 9. : 배방사지 복원을 위한 시굴조사 및 결과 발표회

◦ 2019. 10. ~ 2020. 12. : 배방사지 문화재지정 추진(국가지정)

◦ 2020. 1. ~ 12. : 시굴조사 결과를 바탕으로 한 토지매입 실시

◦ 2021. 1. ~ 2023. 12. : 정밀발굴조사 실시

◦ 2024.이후 : 배방사지 정비(초석만 노출), 주차장 조성, 주변정비 실시

□ 연도별 추진목표

세부사업명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 6월	임기후
배방사지 종합정비		시굴조사	토지매입	1차 발굴조사	2차 발굴조사	유적지 정비

□ 문제점 및 대책

◦ 정확한 사역 확인과 국도비 지원을 위해서는 시․발굴조사가 필수이나       문화재 지정에 따른 재산권 침해를 우려한 토지소유자의 동의 애로

예상

→ 문화재유존지역에 개인이 개발행위를 하는 경우에도 본인 부담의

시․발굴조사가 필수이므로 시에서 우선 조사를 실시하는 것이             개인 부담을 덜어 준다는 점을 인식시킴

◦ 배방사지 사역으로 추정되는 58,000㎡ 면적에 대한 발굴 조사비로

3,500백만 원이 소요될 것으로 예상되어 시 부담 가중

→ 시굴조사 결과를 통해 사역을 다시 재조정하며, 동시에 국가지정

문화재(사적)로 지정을 추진하여 국비를 확보하고 발굴조사 실시

□ 기대효과

◦ 매향비, 태실지와 연계하여 우리지역이 풍패지향임을 널리 홍보하고       지역의 유수한 역사에 대한 지역민 자긍심 고취