생활체육시설 확대 조성 및 정비

관리번호		1-11		주관부서		문화체육과(체육시설팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○		○	○				○			12

◦ 시민들의 건강 증진 및 삶의 질 향상을 위한 생활체육시설 공간 조성

◦ 체육시설을 이용하는 이용객들의 편의를 제공하기 위한 시설 정비

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 관내(사남, 용현, 곤양, 서포)

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2023년

◦ 사 업 량 : 생활체육시설 조성

◦ 사업내용 : 축구장, 풋살장, 족구장, 소규모 운동장 등 조성

◦ 사 업 비(투자계획) : 26,080백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	26,080	2,850	105	2,035	7,715	3,725	2,250	7,400
국 비	3,330	350			990	990		1,000
도 비
시 비	22,750	2,500	105	2,035	6,725	2,735	2,250	6,400
민자 등

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	10%	20%	40%	55%	70%	100%
사남 생활체육시설 조성		부지선정	실시설계, 행정절차이행	부지보상	공사착공	공사 준공
용현 생활체육시설 조성	실시설계	부지보상	부지보상, 공사착공	공사 중	공사준공
곤양 생활체육시설 정비		부지보상 공사착공	공사준공
서포 생활체육시설 조성	부지선정	부지 선정, 행정절차이행	실시설계, 행정절차이행	부지보상	공사착공	공사 준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 용현 생활체육시설 조성

- 2017. 12월 : 설계용역 시행

- 2018.  4월 : 문화재지표조사·지질조사용역 완료

- 2018.  5월 : 주민설명회 개최

- 2018.  9월 : 용역 중간보고회, 실시계획인가 신청

- 2018. 10월 : 공유재산관리계획 반영

- 2019.  1월 : 농업진흥구역 해제 신청

- 2019.  3월 : 도 지방재정 투자심의 조건부 가결, 토지보상계획 공고

◦ 곤양 생활체육시설 정비

- 2019.  2월 : 토지보상계획 공고

□ 향후 추진계획

◦ 사남 생활체육시설 조성(※ 사남면 중심지 활성화 사업과 연계 추진)

- 2019.  5월 : 주민·관련단체 의견수렴

- 2021.  1월 : 토지보상 협의

- 2022.  3월 : 공사 착공

- 2023. 12월 : 공사 준공

◦ 용현 생활체육시설 조성

- 2020.  6월 : 공사 착공

- 2021. 12월 : 공사 준공

◦ 곤양 생활체육시설 정비

- 2019.  4월 : 토지보상 협의

- 2019. 10월 : 2차 공사 착공

- 2020. 12월 : 2차 공사 준공

◦ 서포 생활체육시설 조성

- 2021.  1월 : 토지보상 협의

- 2022.  6월 : 공사 착공

- 2023. 12월 : 공사 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 사남 생활체육시설의 부지 선정 필요

→ 주민설명회, 공청회 등을 거쳐 조속히 부지 선정 진행

◦ 용현 생활체육시설 부지 내 1/3이 문화재 시굴조사 대상으로 사업 지연 우려 → 우선적으로 토지 보상 후 문화재 시굴조사 진행

◦ 서포 생활체육시설 위치선정 및 사업추진 검토

→ 다목적체육회관 건립 요구에 따라 사업추진 여부 결정 및 절차이행