권역별 노인복지센터 건립

관리번호		1-4		주관부서		사회복지과(사회복지팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			7

◦ 날로 다양해져 가는 어르신들의 복지서비스 욕구에 부응

◦ 고령사회에 접어든 어르신들의 건강관리 및 여가선용을 위한 양질의

복지서비스 제공

□ 사업개요

◦ 위    치 : 3개 권역(서부권, 동부권, 남부권)

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

◦ 사업내용 : 권역별 노인복지센터 1동 건립

◦ 사 업 비(투자계획) : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	20,000			100	6,000	6,000	7,900
국 비
도 비
시 비	20,000			100	6,000	6,000	7,900
민자 등

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	5%	10%	50%	80%	100%
권역별 노인복지 센터 건립	건립기본 방침	기본구상용역, 행정절차 진행 (투융자심사, 공유재산심의 등), 도시계획시설결정	실시설계용역, 부지매입, 계약심사, 건축협의 등	공사 착공	공사 준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2018.  9월 : 건립 기본 방침 결정

◦ 2019.  3월 : 타당성 및 기본구상 용역

□ 향후 추진계획

◦ 2019.  6월 : 행정절차 진행(공유재산 심의, 투․융자 심사 등)

◦ 2019. 12월 : 도시계획시설 결정

◦ 2020.  3월 : 실시설계 용역

◦ 2020.  6월 : 용역결과 보고회 개최

◦ 2020.  9월 : 주민설명회 개최

◦ 2021.  3월 : 공사 착공

◦ 2022.  6월 : 공사 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 많은 사업비 소요로 시 재정 여건상 사업기간 장기화 우려