사천항공산업대교 건설

관리번호		2-3		주관부서		도로과(도로계획팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○	○		○				○			15

◦ 산업단지 클러스터 구축을 위한 연계도로 개설 및 기반시설 확충

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 곤양면 검정리 ~ 사남면 초전리

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2025년

◦ 사 업 량 : 교량건설 L=0.75㎞, 접속도로 확․포장 L=1.2㎞

◦ 사업내용 : 교량건설 및 접속도로 확․포장

◦ 사 업 비(투자계획) : 49,000백만원

(단위:백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	49,000	500		370	3,000	20,000	20,000	5,130
국 비	48,430			300	3,000	20,000	20,000	5,130
도 비	300	300
시 비	270	200		70
민자 등

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	10%	20%	30%	40%	50%	100%
사천항공산업 대교 건설	기본구상 용역	타당성조사 및 지질조사	기본 및 실시설계	보상 및 착공	공사	준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2014.  1월 : 제2사천대교 조기건설 건의(경상남도)

◦ 2014. 11월 : 지방도 1001호선→국지도 30호선 승격 건의(국토부)

◦ 2017.  3월 : 제2사천대교 사업추진 건의(경상남도)

◦ 2017. 11월 : 기본구상용역 착수

◦ 2018.  8월 : 중간보고

◦ 2018. 11월 : 기본구상용역 최종보고 및 과업준공

◦ 2018. 11월 ~ : 관계기관 협의

◦ 2018. 12월 : 타당성조사 용역비 국비3억원 확보

◦ 2019.  3월 : 사천항공산업대교 지질조사 시행

□ 향후 추진계획

◦ 2019.  4월 : 타당성조사 용역 시행 실시(부산지방국토관리청)

◦ 2020.  1월 : 기본 및 실시설계, 행정절차 이행

◦ 2021. ~ 2025. : 공사 착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 시 자체예산으로는 추진 불가

→ 중앙부처 지속 협의하여 보조사업 선정

◦ 보조사업으로 추진하기 위해 타당성조사 및 중앙투자심사 필요

→ 타당성조사 관련 관계기관과 지속협의 및 경제성 확보 노력