어시장길·서부시장길 교통흐름 개선

관리번호		3-7		주관부서		교통행정과(교통지도팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			20

◦ 어시장길·서부시장길 주변 불법 보도점거 및 주·정차행위 지도단속과

주차장 및 도로 확포장을 통한 교통흐름 개선으로 통행불편 최소화

□ 사업개요

◦ 위    치 : 어시장길, 서부시장길

- 어시장길 : 삼양급수~청미복집(500m)/- 서부시장길 : 콜핑~청미복집(530m)

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년

◦ 사 업 량 : 주차금지 규제블럭 설치 등 7개

◦ 사업내용

- 주차금지 규제블럭 설치 1식, 어시장길 보도 확보 등

- 에코주차장 설치 및 삼천포전통수산시장주차장 확장

- 도시계획도로 확포장(8m⇒15m), 시내버스정류소 이전 및 택시 승강장 설치

◦ 사 업 비(투자계획) : 9,062백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	9,062	590	3,182	2,190	2,000	1,100
국 비	2,460		600	600	600	660
도 비	492		120	120	120	132
시 비	6,110	590	2,462	1,470	1,280	308

□ 연도별 달성목표

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월
추진율(누계)	10%	70%	90%	100%
서부시장길 주차금지 규제블럭 설치	공사 준공
수협활어센터~ 서부주차장 간 도시계획도로 개설	토지수용	공사 착공 및 준공
삼천포 전통수산시장 주차장 확장	토지수용	부지매입
삼천포커뮤니티 에코주차장 설치	행정절차 이행	공사 착공		공사 준공
서동 322-6 주차선 정비 및 택시승강장 설치 등	협의	공사 착공 및 준공

□ 추진실적

◦ 2018.  7월 : 수협활어센터~삼천포전통시장주차장 간 보상협의

◦ 2018.  7월 : 삼천포전통수산시장 주차장 확장 추진(수용재결 추진)

◦ 2018.  7월 : 삼천포커뮤니티 에코주차장 활성화계획 승인완료(국토부)

◦ 2018. 11월 : 서부시장길 주차금지 규제블럭 설치(경찰서 협의, 31개)

◦ 2019.  2월 : 삼천포커뮤니티 에코주차장 주차타워 실시설계용역 착수

□ 향후 추진계획

◦ 2019.  4월 : 수협활어센터~삼천포전통시장주차장 간 건물 철거

◦ 2019.  4월 : 삼천포전통수산시장 주차장 보상협의 진행

◦ 2019.  5월 : 수협활어센터~삼천포전통시장주차장 간 확포장

◦ 2019.  5월 : 국유지(서동322-6) 및 주차선 정비, 택시승강장 설치

◦ 2019.  7월 : 삼천포커뮤니티 에코주차장 주차타워 사업 착공

□ 문제점 및 대책

◦ 주차금지 규제블럭 설치로 인한 물품 승하차 애로 호소

→ 공익 행정에 대한 이해설득 추진, 설치동의 상점 주변 설치(교통행정과)

◦ 보상 미협의에 따른 사업 지연

→ 협의 및 수용재결을 통한 신속한 대처(지역경제과)

◦ 어시장길 상품 전시형태 개선 및 보행자보도 확보

→ 지속적인 지도 및 단속을 통한 의식개선 추진(도로과)