사천시립도서관 건립

관리번호		4-5		주관부서		평생학습센터(학사운영팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			15

◦ 항공산업인구 증가와 대규모 택지개발에 따른 공공도서관 수요 대비

◦ 정보와 배움, 만남과 소통이 어우러진 공공도서관 신축

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 정동면 예수리 552-2번지 일원(반룡공원 내)

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

◦ 사 업 량 : 연면적 4,638㎡(지상3층, 지하 1층)

◦ 사업내용 : 공공도서관 신축 1식

◦ 사 업 비(투자계획) : 19,624백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	19,624	625		30	9,219	8,656	1,094
국 비	7,162				7,162
도 비
시 비	12,462	625		30	2,057	8,656	1,094
민자 등

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	10%	20%	50%	80%	100%
시립도서관 건립	계획수립	타당성용역 예산확보	설계용역 공사착공	공사시행	자료구입 시설설비	운영

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2012.      : 부지매입 완료

◦ 2018.  9월 : 정책토론회(건립방법 등 논의)

◦ 2018. 10월 : 건립 및 운영 기본계획 수립, 공유재산관리계획

◦ 2019.  1월 ~ 2019.  4월 : 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역

◦ 2019.  2월 : 주민설문조사

◦ 2019.  3월 : 의회보고, 문체부 건립 타당성 검토 결과 적정 통보

□ 향후 추진계획

◦ 2019.  4월 ~  7월 : 경남도 재정투자 심사

◦ 2019.  4월말 : 예산신청

◦ 2020.  1월 ~  5월 : 설계공모

◦ 2020.  6월 ~ 10월 : 건축허가 등

◦ 2020. 11월 ~ 2021. 10월 : 착공 및 준공

◦ 2021. 10월 ~ 2022.  6월 : 도서관 설비 및 자료구입

◦ 2022.  7월 : 개관