사등매립장 악취 및 비산먼지 대책 수립

관리번호		5-20		주관부서		환경사업소(청소시설팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			15

◦ 환경기초시설 악취 저감을 통한 주변지역 환경피해 최소화

◦ 쾌적한 생활환경 조성을 통한 지역주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사등 위생매립장 및 소각장

◦ 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2019. 12월

◦ 사 업 량 : 악취 및 비산먼지 차단시설 설치 1식

◦ 사업내용

- 사등 매립장 악취발생 차단

· 친환경탈취제(EM발효액) 배양기 설치 1식

· 탈취제 살포 차량 구입 1대 / 매립시설 및 주변 친환경 탈취제 살포

- 소각장 악취발생 차단 : 저장호퍼 및 반입시설 스피드 도어 제작설치 4EA

- 사등 매립장 비산먼지 발생억제

· 탈취제 살포차량 활용하여 매립장 및 차량통행로 수시 살수

· 매립장 출입 청소차량 세륜 확행 / 매립장 야적 복토재 방진덮개 설치

◦ 사 업 비(투자계획) : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	100			100
국 비
도 비
시 비	100			100
민자 등

□ 연도별 달성목표

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	5%	100%	100%	100%	100%	100%
악취 및 비산먼지 차단시설 설치	계획수립	착공 및 준공	정상운영	정상운영	정산운영	정상운영

□ 추진실적

◦ 2018.  7월 : 민선7기 시장공약사항 추진계획 수립

◦ 2019.  1월 : 출입 청소차량 세륜 확행

◦ 2019.  3월 : 소각장 반입장 및 저장호퍼 스피드 도어 4EA 제작설치 시행의뢰

□ 향후 추진계획

◦ 2019.  4월 : 소각장 스피드 도어 설치 완료

◦ 2019.  5월 : 매립장 야적 복토재 방진덮개 설치

◦ 2019. 10월 : 친환경 탈취제 배양기 설치 시행

◦ 2019. 11월 : 탈취제 살포·살수용 차량 구입

□ 문제점 및 대책

◦ 친환경 탈취제 배양기와 탈취제 살포·살수 차량 구입은 2회 추경 시 예산 수립 후 추진 가능