모충공원 정비사업

관리번호		5-5		주관부서		녹지공원과(공원팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○			○	○				○			10

◦ 시 공원 정비 및 조성을 통한 쾌적한 시민 휴식공간 제공과 시의 관광이미지 제고

◦ 장기미집행 도시공원 해소로 과도한 사유권 제한 등에 따른 민원 억제

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 송포동 산164-6번지 일원

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

◦ 사 업 량 : 103,406㎡ 중 미조성지 60,338㎡

◦ 사업내용 : 공원부지 매입 및 공원 조성

◦ 사 업 비(투자계획) : 4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6	임기후
계	4,200		200		2,000	1,000	1,000
국 비
도 비
시 비	4,200		200		2,000	1,000	1,000
민자 등

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월
추진율(누계)	10%		50%	70%	100%
모충공원 정비사업	도시계획시설 재정비 및 단계별 집행계획 반영 : 산책로정비		토지매입	토지매입, 행정 절차, 실시설계	조성공사 착공 및 준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2012. 5. 24. : 공원조성계획 수립

◦ 2012. 5. 24. ~ : 공원면적 103,406㎡ 중 43,068㎡ 조성(41.6%)

- 산책로변 경관조성사업(관목 및 초화류 식재)

- 산책로 설치사업(L=216×B=1.5)

- 공원부지매입 : 2필지 595㎡

◦ 2018. 12. 31. : 도시과의 「도시계획시설 재정비 및 단계별 집행계획

수립 용역」과 연계 재정비 방안 및 단계별 집행계획 반영

□ 향후 추진계획

◦ 2019. ~ 2021. : 조성부분 토지매입(45,000㎡) 및 관련 행정절차 이행

◦ 2020. 7. 1. : 조성불요 부분 실효

◦ 2022. : 공원 조성

□ 문제점 및 대책

◦ 과도한 재원투자로 재정부담 가중

◦ 공원구역 조정을 통한 공원기능 유지 필수부분의 선택적 조성 및 불요부분 실효 추진