다솔사역과 와인갤러리 브랜드사업 및 체험단지 조성

관리번호		6-10		주관부서		관광진흥과(관광개발팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○			○	○				○			15

◦ 관광객 증가를 위한 다래와인갤러리 관광명소화

□ 사업개요

◦ 사업위치 : 사천시 곤명면 신흥리 다래와인갤러리 일원

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

◦ 사업내용 : 다래와인갤러리 내 신규콘텐츠 개발, 다래전망대 설치, 체험시설 및 프로그램 확충, 미니재배단지 조성, 교통환경개선 등

◦ 사 업 비(투자계획) : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	1,000			250	250	250	250
국 비
도 비
시 비	1,000			250	250	250	250
민자 등

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	10%	30%	50%	80%	100%
신규콘텐츠 개발		콘텐츠개발	미디어 갤러리조성	미디어 갤러리조성
체험시설 및 프로그램 확충		프로그램개발	체험시설조성
미니재배단지 조성				부지선정 실시설계	재배단지조성

□ 연도별 추진목표

□ 추진실적

◦ 2018. 9월 : 당초예산 편성 요구

◦ 2019. 1월 : 기본계획수립용역 시행

□ 향후 추진계획

<신규콘텐츠 개발>

◦ VR콘텐츠와 트릭아트, 미디어파사드(건물외벽에 LED 조명을 비춰 영상을 표현하는 기법) 등의 다양한 방법을 활용한 신규 콘텐츠 개발을 통하여 미디어 갤러리 조성

- 2019.  4월 ~ 2019. 10월 : 신규 콘텐츠 개발

- 2019. 10월 ~ 2022.  6월 : 미디어 갤러리 조성

<체험시설 및 프로그램 확충>

◦ 와인만들기 체험, 참다래 오감체험 등

- 2019.  4월 ~ 2019. 10월 : 체험행사 벤치마킹 및 프로그램 개발

- 2019. 12월 ~ 2020.  6월 : 체험시설 조성

<미니재배단지 조성>

◦ 다래, 포도 등 와인 재료를 소규모로 재배하여 와인만들기 체험과 연계

- 2021.  1월 ~ 2021.  7월 : 부지선정 및 실시설계

- 2021.  9월 ~ 2022.  6월 : 재배단지 조성

□ 문제점 및 대책

◦ 다래와인과의 협업체계 구축 필요