삼천포시외버스터미널~문화예술회관 도로 확장

관리번호		6-15		주관부서		도시과(도시개발팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			10

◦ 동지역 시가지를 관통하는 도시계획도로를 확장하여 교통편의 제공

◦ 미집행 도시계획시설 정비를 통한 도시기반시설 확충

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 벌리동 일원

◦ 사업기간 : 2016년 ~ 2022년

◦ 사 업 량 : 도로 개설 L=280m, B=20m

◦ 사업내용 : 수도교~벌리신호등간 도시계획도로(중로1-12호선) 개설

◦ 사 업 비(투자계획) : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	8,000	100	300	1,000	2,500	2,500	1,600
국 비
도 비
시 비	8,000	100	300	1,000	2,500	2,500	1,600
민자 등

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	5%	20%	50%	80%	100%
편입 토지 및 지장물 보상협의	감정평가 및 보상협의 착수	보상 협의 (계속)	보상 협의 (완료)
도로 확장			공사 착공	공사 추진	공사 준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2017. 5월 : 실시설계 완료

◦ 2018. 1월 : 실시계획인가

◦ 2018. 6월 : 감정평가 실시 및 보상금 산정

◦ 2018. 9월 : 손실보상 협의 착수

□ 향후 추진계획

◦ 2020. 상반기 : 손실보상 협의 완료

◦ 2020. 하반기 : 공사 착공

◦ 2022. 하반기 : 공사 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 감정평가액이 토지 및 물건 소유자가 기대하는 보상금액에 미치지 못하여 보상협의 지연

→ 사업비 확보 후 수용재결 절차 추진

→ 교량 가설 병행 추진