수석5리 사거리 교통 소통 대책 시행

관리번호		6-18		주관부서		도로과(도로계획팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			10

◦이용객의 편익 증대 및 교통혼잡 해소를 위한 교통소통대책 실시

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 사천읍 수석5리 사거리

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년

◦ 사 업 량 : 입체횡단시설 L=440m

◦ 사 업 비(투자계획) : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	20,000		200		10,000	9,800
국 비	20,000		200		10,000	9,800
도 비
시 비
민자 등

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	10%	20%	50%	100%
수석5리 입체횡단시설 설치	기본 및 실시설계	도로구역 변경 등 행정절차 이행	공사 착공	공사 준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2017.  6월   : 교통혼잡 해소를 위한 수석5리 사거리 교차로 개선 건의

◦ 2018.  6. 25. : 수석5리 사거리 입체횡단시설 설치공사 기본 및 실시

설계 착수(부산지방국토관리청 진주국토관리사무소)

- 용역기간 : 2018. 6. 25. ~ 2019. 1. 20.

◦ 2018. 11. 27. : 주민설명회 개최(3회) - 고가도로 설치 반대

◦ 2019. 1월 : 사업 추진방식 검토 및 관계기관 협의

◦ 2019. 2. 7. ~ 3. 8. : 주민의견 조사실시(평면차로 확장 선호)

◦ 2019. 3. 14. : 입체횡단시설 설치관련 건의

- 사천2교~배춘삼거리 구간(평면차로 확장)

□ 향후 추진계획

◦ 2020. ~ 2021. : 공사 착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 국도3호선의 도로관리청은 부산지방국토관리청이며 교통정체 해소방안(지하차도, 고가도로 등)에 대한 의견 차이가 있음

→ 관계기관 지속협의 추진