가산오광대 전수관 정비

관리번호		6-6		주관부서		문화체육과(문화재팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			10

◦ 불필요한 행정재산을 적극 매각하여 관리 유지에 따른 부담 경감

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 축동면 가산리 830-2번지 외 1필지

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년

◦ 사 업 량 : 건축물 2동 철거, 주변정비

◦ 사업내용 : 가산오광대 전수관 철거 및 주변정비 1식

◦ 사 업 비(투자계획) : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	100				100
시 비	100				100

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)		20%	100%
가산오광대 전수관 정비		매각 공고	철거 완료

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2019. 1월 ~ 3월 : 시설 이용 희망자 협의(부결-구체적 이용계획 미비)

□ 향후 추진계획

◦ 2019. 4월 : 행정재산 용도폐지

◦ 2019. 8월 : 공유재산 매각심의

◦ 2019. 9월 ~ 12월 : 행정재산 매각

◦ 2020. 1월 ~  5월 : 매수자 없을 시 철거

□ 문제점 및 대책

◦ 도심지와 떨어져 있어 접근성이 떨어지고 고속도로 아래로 진입로가

있어 대형 차량 진입이 어려움

◦ 건축물 규모(475.22㎡)가 커 1개 단체에서 활용하기 어려움