사천읍 실내수영장 건립

관리번호		1-12		주관부서		문화체육과(체육시설팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○	○		○					○		5

◦ 시민들의 건강 증진 및 삶의 질 향상을 위한 생활체육시설 공간 조성

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천읍지역

◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2023년

◦ 사 업 량 : 다목적 체육센터 건립 1개소

◦ 사업내용 : 수영장, 실버웨이트 존, 다목적체육관, 부대시설 등

◦ 사 업 비(투자계획) : 10,000백만원(※ 위치변경 시 추정사업비)

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	10,000				1,000	6,000	2,000	1,000
국 비	3,000				1,000	1,000	1,000
시 비	7,000					5,000	1,000	1,000

□ 연도별 달성목표

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)		10%	20%	60%	90%	100%
실내수영장 건립		부지선정, 행정절차이행, 공모신청 사업확정	공모신청, 실시설계	착공	공사 중	준공

□ 추진실적

◦ 2017.  9. 25. : 사천선인 공공주택지구내 공공시설 의견 회신(→건축과)

◦ 2018.  4. 18. : 지구계획 승인 협의 회신(체육부지 위치 변경 건의)

◦ 2018. 10. 12. : 실내수영장 조기착공을 위한 협의(LH한국토지주택공사)

◦ 2018. 10월 ~ 12월 : 실내수영장 건립을 위한 부지 협의(국방부, 제3훈비)

◦ 2019.  1월 : 2019년 생활체육시설 확충 지원사업 공모 신청

◦ 2019.  3월 ~ 4월 : 사천읍 실내수영장 건립사업 위치 검토 및 위치 변경

◦ 2019.  5월 : 사천시 생활밀착형 국민체육센터 건립 기본계획용역 시행

◦ 2019.  6월 : 2020년 생활SOC복합화사업 가배정 물량 확보

□ 향후 추진계획

◦ 2019.  7월 ~ 8월 : 2020년 생활SOC복합화 사업계획서 제출, 행정절차 추진

◦ 2020.  9월 : 2020년 생활SOC복합화 사업 확정

□ 문제점 및 대책

◦ 2020년 생활SOC복합화 사업 확정을 위해 사업계획 준비 철저