UND 항공대학 분교 유치

관리번호		2-1		주관부서		기획예산담당관(대외협력팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○	○		○					○		3

◦ 항공산업 R&D특화 및 항공클러스터 활성화로 지역 전략산업 경쟁력 강화

◦ 아시아 지역 항공교육 및 항공분야 연구거점 조성으로 국제 교육수요 흡수

◦ 교육 경쟁력 강화를 통한 교육자본의 해외 유출 방지

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 송포도시첨단산업단지 내

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

◦ 사업내용 : 미국 노스다코타 주립대(UND) 항공대학 아시아캠퍼스(분교) 설립

◦ 사 업 비(투자계획) : 150,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	150,000			10,000	30,000	30,000	30,000	50,000
국 비
도 비
시 비	150,000			10,000	30,000	30,000	30,000	50,000
민자 등

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)		10%	20%	40%	80%	100%
UND항공대학 분교 유치		본교 방문 및 MOU 협약체결, 타당성 검토	MOA체결	투·융자심사 대학설립인가	착공	준공 및 개교

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2019. 2월 : 외국교육기간 설립 절차 등 문의(교육부 교육국제화담당관)

◦ 2019. 3월 : 외국대학 유치중인 지자체를 통한 자료 수집 등

◦ 2019. 4월 : 외국대학 유치 관련 자료 수집 등(지자체, 언론, 전문가)

◦ 2019. 5월 : 관련 법령 및 부서의견 검토

□ 향후 추진계획

◦ 대학설립 인가를 위해 경상남도, 교육부 등과의 긴밀한 협조체제 유지

◦ UND 항공대학 관계자들과 구체적 실무협상 추진

- 필요시 협상 실무단 미국 본교 방문 추진

◦ 행정절차 이행 : 타당성 검토, 투‧융자 심사 등

□ 문제점 및 대책

◦ 대학 설립 승인을 받고도 제대로 개교가 되지 않는 사례로 인해 외국 교육

기관 설립에 부정적인 반응(교육부)을 보이고 있으므로 신중하게 검토 후 추진

◦ 실패사례

- 2016년 8월 : 하동 영국 애버딘대학교 한국캠퍼스 대학 설립 승인(교육부)

- 2017년 5월 : 애버딘대학교 한국캠퍼스 운영 협약 체결

(경상남도, 하동군, 광양만권 경제자유구역청, 애버딘대학교)
- 2018년 5월 : 한국캠퍼스 개교 철회 통보(애버딘대학교)