죽방렴, 섬 주변 야간경관사업

관리번호		3-8		주관부서		도시과(도시경관팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			20

◦ 사천바다 케이블카와 연계한 주변 관광자원 확대

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천바다 케이블카 초량정류장 내 배 전망대

◦ 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월

◦ 사 업 량 : 야간경관 시설 설치

◦ 사업내용 :「케이블카 공원 주변 경관조명 설치사업」사업구간 중 초양정류장

내 배 전망대 조명 설치

◦ 사 업 비(투자계획) : 345백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	345			345
도 비	65			65
시 비	280			280

□ 연도별 달성목표

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	10%	100%
야간경관사업	계획수립	완공

□ 추진실적

◦ 2019. 1.  7. : 경상남도 2019년 경관사업 응모

◦ 2019. 1. 28. : 경상남도 경관사업 대상자 선정 완료

◦  2019.  2.  20.  : 관광진흥과 「케이블카 공원 주변 경관조명 설치사업」과

연계하여 사업 추진

◦ 관광진흥과 실시설계 용역 중

□ 향후 추진계획

◦ 2019. 1월 ~  7월 : 야간경관조명 기본계획 및 실시설계

◦ 2019. 8월 ~ 12월 : 경관조명 설치