사천시립도서관 건립

관리번호		4-5		주관부서		평생학습센터(학사운영팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			18

◦ 항공산업인구 증가와 대규모 택지개발에 따른 공공도서관 수요 대비

◦ 최적의 독서문화서비스 제공을 위한 시(市)직영 공공도서관 신축

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 정동면 예수리 552-2번지 일원(반룡공원부지 내)

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

◦ 사 업 량

- 건립규모 : 대지면적 6,525㎡, 연면적 4,638㎡(지상3층, 지하 1층)

- 주요시설 : 자료실, 다목적홀, 북카페, 전시공간, 강의실 등

◦ 사 업 비(투자계획) : 19,192백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	19,192	588		30	2,238	7,834	8,502
국 비	7,162				895	3,134	3,133
도 비
시 비	12,030	588		30	1,343	4,700	5,369
민자 등

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	10%	20%	40%	80%	100%
시립도서관 건립	계획수립	타당성용역 예산확보	설계공모 실시설계	공사착공	공사준공 개관준비	운영

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2018.  9월 : 정책토론회 개최 - 건립방법 등 논의

◦ 2018. 10월 : 건립 및 운영 기본계획 수립

◦ 2019.  1월 ~ 2019.  4월 : 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역

◦ 2019.  2월 : 전문가 의견 수렴 및 주민설문조사

◦ 2019.  3월 : 의회보고, 문체부 타당성 검토 결과 통보(적정)

◦ 2019.  4월 : 문체부 균특 예산 신청 및 경남도 지방재정투자 심사 의뢰

◦ 2019.  6월 : 공유재산관리계획(변경) 심의 의결, 경남도 지방재정 투자심사승인

(조건부)

□ 향후 추진계획

◦ 2019.  7월 ~  8월 : 공공건축 사업계획 사전검토 신청

◦ 2019.  7월 ~ 12월 : 내부 인테리어 자료수집 및 설계공모 기초자료 작성

◦ 2020.  1월 ~  5월 : 설계공모

◦ 2020.  6월 ~ 12월 : 기본 및 실시설계

◦ 2021.  1월 ~ 2022.  6월 : 공사 및 개관 준비

◦ 2022.  7월 : 개관