사천만 갯벌해양생태 환상형 자전거도로 개설

관리번호		5-15		주관부서		도로과(농어촌도로팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
	○	○		○				○			3

◦ 해변도로를 시민과 관광객이 함께하는 테마형 자전거 명품도로 구축

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 관내

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2025년

◦ 사업내용 : 자전거도로 개설 및 지정 L=90km

◦ 사 업 비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	3,000			70	530	500	500	1,400
시 비	3,000			70	530	500	500	1,400

※ 사천시 둘레길(탐방로 정비) 조성사업 등과 연계하여 국․도비 확보

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)		10%	20%	30%	50%	100%
자전거도로 개설		기본계획 및 실시설계	공사착공	공사추진	공사추진	공사준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2018. 10월 : 현장 확인

◦ 2019.  3월 : 용역설계서 작성

□ 향후 추진계획

◦ 2019.  9월 : 실시설계용역

◦ 2020.  1월 : 공사 착공

◦ 2025. 12월 : 공사 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 사업비 과다로 예산 확보 애로

→ 사천시 둘레길 조성사업 등 다른 사업과 연계하여 국도비 확보

※ 19.5월: 지역균형발전사업(곤양천 뚝방길)으로 국도비 신청 건의(L=5.6km/18억원)