용두공원 야간명소화 사업

관리번호		5-4		주관부서		녹지공원과(녹지팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○			○	○				○			20

◦ 용두공원 내 시설물 및 공휴지를 활용한 조명시설 설치로 공원이용객의 편의

증대는 물론 만남의 장소 제공을 위한 야간경관 개선

◦ 산책로 등 기존 시설물을 정비하여 주․야간 이용시민의 보행 안전 확보

□ 사업개요

◦ 위    치 : 용두공원(용강동 355번지 일원)

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년

◦ 사 업 량 : 야간 명소화 조성 1식

◦ 사업내용 : 야간조명 설치(목교 및 장미원 LED) 3개소, 산책로 탄성포장 정비 900m

◦ 소요사업비 : 406백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6	임기후
계	406	36	40	50	280
시 비	406	36	40	50	280

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년
추진율(누계)	10%	30%	100%
용두공원 야간조명 설치	3개소 조명 설치		3개소 조명 설치
용두공원 탄성포장 정비		공사 착공 및 준공 (200m)	공사 착공 및 준공 (700m)

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2017. 5월 : 용두공원 풍차 조명 설치(36백만원)

◦ 2018. 7월 ~ 9월 : 용두공원 목교 3개소 조명 설치(40백만원)

◦ 2019. 2월 ~ 3월 : 와룡저수지 주변 산책로 정비(50백만원)

□ 향후 추진계획

◦ 2020. 1월 ~ 3월 : 목교 및 장미원 LED 조명 3개소(130백만원)

◦ 2020. 3월 ~ 4월 : 산책로 탄성포장 정비 700m(185백만원)

□ 문제점 및 대책

◦ 야간 조명 설치로 인한 수목 생육환경 저해 우려

→ 데크 등 시설물에 설치하여 수목 생육저해 최소화