국도3호선~금문해안도로간 연결도로 개설

관리번호		6-14		주관부서		도시과(도시계획팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○			○	○				○			24

◦ 신청사 및 신도시 개발에 따른 연결도로 개설 시급

◦ 지역균형발전 및 도시기반시설 확충

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 용현면 금문리 일원

◦ 사업기간 : L=896m, B=25m

◦ 사 업 량 : 2015. 1월 ~ 2022. 12월

◦ 사업내용 : 연결도로 개설 L=896m, B=25m

◦ 사 업 비(투자계획) : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	9,000	1,550	500	500	2,000	2,000	2,000	450
도 비	750	750
시 비	8,250	800	500	500	2,000	2,000	2,000	450

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	23%	28%	51%	73%	95%	100%
도로 신설	토지보상	토지보상	토지보상	공사착공	공사시행	준공

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2013. 11월  : 투융자 심사

◦ 2015.  9월  : 손실보상협의(1차구간 : 국도3호선~금문마을방향 L=150m)

◦ 2017.  4월 : 손실보상 재산정 (토지 5, 지장물 3, 594백만원)

◦ 2017.  6월 ~ 2018. 2월 : 지장가옥(5필지) 철거

◦ 2018.  1월 ~  : 손실보상협의 계속

◦ 2019.  2월 : 시의회 5분 자유발언 및 주민건의 등에 따라 노선폭원축소 검토보고

◦ 2019.  3월 ~ 7월  : 노선폭원 검토를 위한 실시설계용역 시행

□ 향후 추진계획

◦ 2019.  8월 ~ : 도시계획시설사업 실시계획인가

◦ 2019. 10월 ~ : 손실보상 협의

◦ 2021.  2월 ~ 2022. 12월 : 공사착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

◦ 2015년부터 국도3호선~기존 금문마을도로 L=140m구간에 대한 보상이 진행 중에 있으나, 시 재정여건상 사업의 장기화가 불가피하며, 사업의 장기화로 토지보상비 및 공사비 증가 등이 예상

◦ 원활한 사업추진을 위하여 도로의 폭원을 축소하여 사업 추진