시도1호선 확장사업 본격 시행

관리번호		6-17		주관부서		도로과(도로계획팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			7

◦ 이용객의 편익 증대 및 교통혼잡 해소를 위한 도로 확장

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사남면 LIG 삼거리 ~ 남양동행정복지센터 일원

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 임기후

◦ 사 업 량 : 도로 확․포장 L=8.42㎞

◦ 사업내용 : 시도1호선 확․포장

◦ 사 업 비 : 120,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	120,000		227	573	5,000	5,000	5,000	104,200
시 비	120,000		227	573	5,000	5,000	5,000	104,200

□ 연도별 달성목표

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
추진율(누계)	5%	10%	20%	30%	40%	100%
시도1호선 확장 사업 본격 시행	시도1호선 확장 사업 본격 시행	설계완료 행정절차 이행 및 보상	보상 및 구간별 공사추진	보상 및 구간별 공사추진	보상 및 구간별 공사 추진 (LIG삼거리~ 죽천교 구간 완료)	확장 완료

□ 추진실적

◦ 2018.  7월 : 시도1호선 확․포장공사 추진계획 보고

◦ 2018. 12월 : 과업 착수

◦ 2019.  3. 6. : 착수 보고

◦ 2019.  4월 : 의회 보고 및 주민설명회 개최

◦ 2019.  6월 : 용역 중간 보고

□ 향후 추진계획

◦ 2019.  9월 : 최종 보고

◦ 2019. 10월 : 기본 및 실시설계 완료 - 구간별 우선 사업시행 구간 선정

◦ 2019. 10월 : 보상 추진(시도1호선 확장 본격 시행)

□ 문제점 및 대책

◦ 시도1호선 전 구간 동시 확장은 막대한 사업비 소요되므로 추진 애로

→ 실시설계 후 구간별 확장 추진