- 바다마실 삼천포愛에 빠지다(삼천포구항) -

삼천포 구항 도시재생사업

1

사업개요

▣ 사 업 명: 바다마실 삼천포愛에 빠지다

▣ 위치/면적: 사천시 동서동, 선구동, 동서금동 일원 / 291,829㎡

▣ 사업유형: 중심시가지형

▣ 사업기간: 2018년 ~ 2023년(7년간, 1년 연장)

▣ 사 업 비: 300억원(국 150억원, 도비30억원, 시비 120억원)

▣ 사업내용: 블루웨이 통합경관조성 등 14개 단위사업

단 위 사 업	사업비	주 요 내 용	진행단계	비고
합계	300
블루웨이통합 경관조성	33.58	해안보행로 조성(데크 및 도막포장)L=1.71km	완 료
삼천포전통수산 시장개방공간조성	16.62	상가보행환경개선(400㎡)	설계중
바다조망테라스 ‘바라보所’	14.04	바다조망테라스, 덕장갤러리 및 휴게시설설치	일상감사
방파제파도공원	14.09	파도공원 조성(A=2,000㎡)	완 료
어시장길특성화	9.27	재래시장 보행환경 개선 L=400m	완 료
시장지원거점조성	2.14	건축물 리모델링(1층70㎡, 2층68㎡)	완료(운영준비)
복합문화공간 ‘지혜의 바다’	32.62	복합문화공간, 마을목공소 조성	완 료
청년문화 에비뉴	28	청년창원지원 공간조성, 지역자원활용먹거리개발	운영준비
인포메이션 거점조성	5.23	관광안내센터설치, 관광활성화사업추진	운영준비
문화오름설치	38.61	수직엘리베이터, 커뮤니티하우스 3개소	완 료
삼천포커뮤니티 에코주차장	40.68	에코주차장 신축 1식(2층 3단 1,069.41㎡) (2층 진입로 추가 검토 추진)	완 료 (2층 진입로검토)	지역 경제과
복합교류공간 ‘7004’조성	8.5	복합교류공간(300㎡) 1식	완 료
청널공원 주민거점화	9.22	외부휴게시설, 풍차리모델링 등	완 료
도시재생역량 기반구축사업	22.9	도시재생대학 및 도시재생 모니터링 등	추진중
파랑마을정비사업	14.5	도로 및 인프라시설 건축물 경관정비 등	완 료
현장지원센터 운영비	10.0	삼천포구항 현장지원센터 운영 1식	추진중

▣ 활성화계획

공모선정		2018. 08. 16.	계획방식	선도지역
선도지역지정		2018. 5. 8.
전략계획수립		최초	2019. 1. 10.(사천시 공고 제2019-26호)
		변경(최종)
활성화계획 승인이력		실현타당성평가 (종합평가 날짜)	특 위	고 시	변경구분
	최 초	2018. 7. 17.	2018. 7. 31.	2018. 8. 16.	-
	1차 변경	2021. 5. 6.		2021. 7. 15.	경미한 변경
	2차 변경			2022. 12. 8.	경미한 변경
	3차 변경			2023.11.23.	경미한 변경 (1년 연장)
	4차 변경

2

그간 추진현황

▣ 18. 08. : 활성화계획 승인

▣ 19. 06. : 도시재생 복합교류공간‘7004’ 조성공사 준공

▣ 20. 11. : 삼천포커뮤니티 에코주차장 준공

▣ 21. 03. : 청널공원 주민거점화 준공

▣ 21. 06. : 복합문화공간 ‘지혜의 바다’ 준공

▣ 21. 05. : 실현가능성 및 타당성 평가 완료

▣ 21. 07. : 활성화계획 변경 승인 고시

▣ 21. 09. : 방파제 파도공원 조성사업 준공

▣ 21. 11. : 어시장길 특성화 준공

▣ 21. 11. : 청년문화 에비뉴 준공

▣ 21. 11.　： 청널공원 주민거점화(카페) 운영

▣ 21. 12. : 복합교류공간 '7004'(카페) 운영

▣ 22. 04. : 블루웨이 통합경관 조성사업 준공

▣ 22. 07. : 인포메이션거점 조성 내부시설 정비 완료

▣ 22. 12. : 활성화계획(경미한 변경) 고시

▣ 23. 03. : 문화오름 설치사업 준공

▣ 23. 09. : 시장지원 거점 조성사업 준공

▣ 23. 09. : 파랑마을 정비사업 준공

▣ 23. 11. : 활성화계획(경미한 변경) 고시

3

향후 추진계획

▣ 24. 02. : 청년문화 에비뉴 내부시설 정비사업 준공

▣ 24. 03. : 삼천포구항 도시재생 바다조망테라스 바라보所 덕장 정비 완료

▣ 24. 06. : 삼천포 전통수산시장 개방공간 정비사업 준공

- 바다로 열리는 문화마을, 큰고을 大芳 굴항 -

대방 굴항 도시재생사업

1

사업개요

▣ 사 업 명: 바다로 열리는 문화마을, 큰고을 大芳 굴항

▣ 위치/면적: 사천시 대방동 일원 / 83,000㎡

▣ 사업유형: 주거지지원형

▣ 사업기간: 2019년 ~ 2024년(6년간)

▣ 사 업 비: 150억(국 90, 지방비 60)

▣ 사업내용: 자율주택정비사업 외 8개사업

단 위 사 업	사업비	주 요 내 용	진행단계	비고
자율주택정비사업	11.11억	· 임대주택 주민공동시설, 편의시설, 공영상가, 보육시설, 주차장 등	모집 중 (신청자 없음)
생활인프라 개선사업	15.46억	· 바닥페이빙, CPTED, 소화전, 클린하우스, 골목길 아트, 생활도로개설 등	완료
굴항공간재생사업	13.29억	· 공원조성 2,187㎡, 화장실 1동 등	1차분 완료, 2차분 추진 중	보 상 완 료
해안공원 조성사업	48.27억	· 해안공원조성, 주차장, 해안 보행데크 등	1차분 완료 2차분 추진 중	조선소 미보상
공유경제플랫폼 조성사업	9.87억	·북카페, 아카이빙 전시실 등	건축설계 중	보 상 완 료
대방모두자리 조성사업	8.70억	·게스트하우스	완 료	운영 중
집수리지원사업	4.16억	·집수리 40호	추진 중 (32호)	추가모집 예정
복합커뮤니티센터 조성사업	28.26억	·복합커뮤니티센터, 빨래방	빨래방 추진 중	운영 중
주민제안 공모 및 주민역량강화사업	6.00억	·주민 공모사업, 도시재생대학 교육 등	추진 중

▣ 활성화계획

구 분	실현타당성평가	특 위	고 시	변경구분
최 초	2019.07.31.	2019. 9.	2019. 10. 01.	-
1차(변경)	-	-	2022. 12. 08.	경미한 변경
2차(변경)	-	-	2023. 11. 16.	경미한 변경

2

그간 추진현황

▣ 2018. 08. : 도시재생 뉴딜사업 선정

▣ 2018. 12. : 도시재생 선도지역 지정

▣ 2019. 09. : 도시재생 활성화계획 승인 고시

▣ 2021. 10. : 대방 모두자리(게스트하우스) 준공

▣ 2022. 05. : 해안공원 조성사업(1차분) 준공

▣ 2022. 05. : 굴항 공간재생사업(1차분) 준공

▣ 2022. 06. : 대방 모두자리(게스트하우스) 사용수익허가(운영 중)

▣ 2022. 08. : 복합커뮤니티센터 준공

▣ 2022. 12. : 도시재생 활성화계획 변경 고시(1년 연장)

▣ 2023. 05. : 공간재생사업(2차분) 실시계획인가 고시

▣ 2023. 08. : 해안공원 제일조선소 재감정평가

▣ 2023. 11. : 해안공원 조성사업(2차분) 착공

▣ 2023. 11. : 해안공원(2차분) 실시계획인가 고시

▣ 2023. 11. : 도시재생 활성화계획 변경 고시(1년 연장)

▣ 2024. 02. : 굴항 공간재생사업(2차분) 착공

3

향후 추진계획

▣ 2024. 02. : 집수리 지원사업 추가 모집 공고

▣ 2024. 02. : 빨래방 조성사업 착공

▣ 2024. 02. : 공유경제 플랫폼 조성사업 착공

▣ 2024. 06. : 해안공원 조성사업(2차분) 준공

▣ 2024. 07. : 굴항 공간재생사업(2차분) 준공

▣ 2024. 07. : 빨래방 조성사업 준공

▣ 2024. 08. : 공유경제 플랫폼 조성사업 준공

▣ 2024. 09. : 집수리 지원사업 2차분 준공