사천시 고시 제2019 - 270호

노산공원2 급경사지 붕괴위험지역 정비사업

실시계획 변경 수립 고시

사천시 고시 제2019-108호(2019.4.29.)로 실시계획 수립 고시된 노산공원2 급경사지 붕괴위험지역 정비사업에 대하여『급경사지 재해예방에 관한 법률』제13조제1항 및 같은법 시행령 제7조 규정에 따라 실시계획 변경 수립하여 고시합니다.

2019년   12월   04일

사    천    시    장

1. 변경고시 요지

가. 사 업 명(변경)

- 당초 :　급경사지 붕괴위험지역 정비사업

- 변경 :　노산공원2 급경사지 붕괴위험지역 정비사업

나. 사업의 위치 : 사천시 서금동 101-67번지 일원

다. 사업규모

- L형측구 L=59m 및 수로관 L=49m, 자연석옹벽 L=51m 및 경관블럭 L=25m

- 낙석방지망 A=800㎡ 및 낙석방지책 L=44m

- 아스팔트포장 A=500㎡, 보도블럭포장 266㎡

- 가옥철거 5가구

라. 사업비 : 3,700백만원

마. 사업기간(변경)

- 당초 : 2018. 01. ~ 2020. 12.

- 변경 : 2019. 11. 11. ~ 2020. 12. 31.

바. 연차별 투자계획

구분	2018년	2019년	2020년
사업내용	보상협의	보상 및 철거공사	낙석방지시설 설치 등
사업비	1,400백만원	1,300백만원	1,000백만원

사. 사업시행자의 명칭 및 주소

○ 성   명 : 사천시장(재난안전과장)

○ 주   소 : 경상남도 사천시 시청로 77

아. 다른사업과의 중복성 및 연계성 검토결과 : 해당사항없음

자. 사업효과분석 : 급경사지붕괴위험지역 정비를 통한 재해예방

차. 준공된 급경사지 유지관리에 관한 사항(변경)

- 당초 : 사천시장

- 변경 : 사천시장(재난안전과장)

2. 관계도서는 사천시청 재난안전과에 비치하였으며, 기타 공사와 관련한 자세한 내용은 사천시청 재난안전과(055-831-3317)로 문의하시기 바랍니다.