	용현면 행정복지센터 신축공사 기본 및 실시설계용역
과 업 지 시 서

2019.  11.

사  천  시

(건 축 과)

-  목   차  -

제1장 설계 일반사항	1

1. 과업명칭	1

2. 과업개요	1

3. 과업기간	1

4. 과업범위	2

5. 일반사항	3

6. 법령 등의 적용	9

7. 설계용역 손해배상보험 또는 공제 가입	9

8. 계약의 해지	10

제2장 설계 진행사항	11

1. 설계도서 작성	11

2. 설계진행시 제출서류	12

3. 보고 및 회의 등	13

제3 분야별 설계	15

1. 일반사항	15

2. 사전조사에 관한 사항	15

3. 건축분야	16

4. 설비분야	17

5. 토목·조경분야	19

6. 전기분야	20

7. 통신분야	21

제4장 설계도서 납품목록	23

1. 성과품의 작성	23

2. 기본설계 납품도서	28

3. 실시설계 납품도서	29

[서식1] 보안각서	30

[서식2] 월간업무보고	31

[서식3] 책임기술자선임계	32

[서식4] 설계용역 참여기술자 현황	33

[서식5] 설계공정예정공정표(예시)	34

제1장 설계 일반사항

1. 과업명 : 용현면 행정복지센터 신축공사 기본 및 실시설계 용역

2. 과업개요

가. 개 요

구 분	용현면 행정복지센터 신축공사 기본 및 실시설계 용역	비 고
위 치	사천시 용현면 송지리 228-1번지 일원
대지면적	약 2,614㎡
연 면 적	약 1,500㎡ (±5% 이내)
층수/동수	지상3층
용 도	업무시설(공공청사)
주요시설	- 1층 ~ 2층 : 행정복지센터 - 3층 : 오동지교류센터
추정공사비	4,000,000천원(부가세 포함)
추정설계비	174,262천원(부가세 포함)

※ 연면적, 주요시설 등은 향후 변경 될 수 있음.

3. 과업기간

가. 착수일로부터 120일(단, 각종 인·허가, 심의, 위원회 자문, 일상감사 및 계약심사 기간 등은 제외)

나. 용역 완료 후에라도 설계용역과 관련한 각종 협의업무 및 관련자료 제출과 설계미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 수행 하여야 한다.

다. 과업수행기간 연장 또는 정지는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「용역계약일반조건」에 의하되, 다음의 경우에도 연장 또는 정지할 수 있다.

1) 발주자 방침에 의하여 과업수행 중단 또는 과업내용 변경 되었을 경우

2) 관련기관(부서) 협의, 자문, 심의, 심사, 검토 등 기간이 소요되는 경우

3) 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능한 경우

4) 기타 발주자 필요에 의한 경우

4. 과업범위

가. 설계도서 작성(도면, 시방서, 구조계산서, 내역서, 일위대가표, 단가조사표, 수량산출서, 예정공정표 및 기타 국토교통부령이 정하는 공사에 필요한 서류)

나. 주민설명회, 설계보고회 등에 대한 업무수행(필요시)

다. 기술자문심의, 건축심의, 경관심의, 건축협의, 실시계획인가, 계약심사, 일상감사 등 각종 심의, 협의, 심사, 감사 등에 필요한 서류작성 및 행정절차이행

라. 현황측량(경계측량 포함) 및 지질(토질)조사 등 설계에 필요한 일체의 조사와 보고서 작성

마. 장애물 없는 생활환경(Barrier Free) 우수등급 이상으로 예비인증 취득

바. 설계 안전성 검토, 지하안전영향평가, 우수유출 저감대책, 교통영향 분석․개선 대책, 환경영향평가, 사전재해영향성검토 등 관련법령에 해당할 경우 서류작성 및 절차이행

사. 기타 본 과업지시서에서 정하는 사항 및 당해 사업 수행에 있어 필요하다고 인정되어 발주자가 요구하는 사항

5. 일반사항

가. 설계자 의무

1) 수급인은 본 과업지시서 및 관계법령에 따라 신의성실한 자세로서 과업을 수행하고, 설계 시 의문사항이나 문제점이 발생할 경우에는 감독공무원과 협의 후 이행 한다.

2)  과업지시서를 충분히 숙지한 후 설계도서를 작성하며, 본 설계용역 시 취득한 제반 비밀사항에 대하여는 누설을 금한다.

3) 설계자는 본 과업수행을 위하여 각 분야별 기술자가 주요시설을 조사하여 충분한 기초자료 수집 및 지식을 습득한 후 과업에 임하도록 하여야 한다.

4) 용역수행을 위하여 투입된 인력의 수 및 기술자의 능력이 본 용역을 성공적으로 수행하기에 부족하다고 발주자가 판단하여 보완 지시할 경우에는 설계자는 즉시 보완하여야 하며, 이로 인한 지연부분이 발생할 경우에는 대책을 수립하여 발주자에게 제출하여야 한다.

5) 모든 자재는 KS제품 적용을 우선으로 하되 사용자재 및 시공방법 등을 검토하여 최적의 제품으로 설계 한다.

6)  설계자는 건축공사 완료 후 건축물의 대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙에 따른 건축협의 완료 통보 및 사용승인에 따른 준공도서(건축물기재대장신청서, 사용승인내역, 현황도면 등)를 시공사와 협의하고, 작성 제출하여야 한다.(세움터 접수포함)

나. 감독

1) 수급인은 우리시에서 임명하는 감독공무원의 지시를 받아서 본 과업을 수행하여야 한다.

2) 과업 지시내용 및 계약서상 내용이 상충되거나 의문이 있을 경우 감독공무원의 지시에 따른다.

3) 감독공무원은 과업 수행 중 용역대리인이나 수급인이 과업수행에 부적당 하다고 인정될 때에는 즉시 교체를 요구할 수 있으며, 수급인은 지체 없이 이를 이행하여야 한다.

다. 업무협의

1) 설계자는 설계진행과 관련하여 발주자와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. (단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.)

2) 발주자는 설계자에게 설계 중 이행이 완성된 부분의 설계 도서를 제출․요구하여 수정․보완 지시할 수 있으며, 설계자는 정당한 사유 없이 이를 거절할 수 없다.

3) 설계자는 각종회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료를 작성하여 회의에 참석하여야 한다.

라. 보고

설계자는 아래 각 사항에 대하여 보고 후 검토된 과업을 진행한다.

1) 기본설계(안) 보고 : 발주자가 기본설계(안)을 선정할 수 있도록 기본설계(안) 3개 이상을 제출하여야 하며, 발주자가 선정한 기본설계(안)에 발주자의 요구사항을 반영하여 설계를 진행하여야 한다.

2) 실시설계 중간보고 : 발주자가 선정한 기본설계(안)에 발주자의 요구사항을 실시설계에 반영하여 진행한 내용을 발주자에게 보고하여야 한다.

3) 수시보고 : 기타 발주자로부터 보고 요구가 있는 경우

다. 납품 이후 설계 하자(설계도서 상호간의 모순, 건축협의 불가, 구조적인     모순, 관계법규 저촉 등)로 인하여 발생되는 설계변경 등 모든 사항에  대하여는 관계법령에 따라 설계자가 일체의 책임을 져야 한다.

라. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정하는 중요한 사항은 감독공무원과 협의하여 결정하고 기타 감독공무원이 별도 추가 과업이 필요하다고 인정하여 요구할시 수급인은 이에 따르며 이에 소요되는 비용은 수급인이 부담한다.

마. 각종 서류작성 및 행정절차이행

1) 설계자는 본 과업과 관련하여 각종 심의, 협의, 심사, 감사 등에 필요한 서류를 작성하여 관련기관(부서)에 제출·설명하여야 한다.

2) 장애물 없는 생활환경(Barrier Free) 우수등급 이상으로 예비인증을 취득하기 위하여 필요한 서류를 작성하여 관련기관(부서)에 제출·설명하여야 한다.

3) 설계용역 계약자는 설계와 관련된 각종 공청회 및 설계심의회에 참석하여 설명은 물론 자료를 작성하고, 보완요구 사항이 있는 경우는 이를 즉시 보완조치 하여야 한다.

4) 설계자는 설계기간 또는 완료 후에라도 공사착공에 필요한 제반 행정 절차(심의, 심사, 인․허가 협의 등)가 조속히 처리될 수 있도록 적극적인 노력을 하여야 하며, 이를 수행함에 있어 발주자가 요청하는 사항 및 행정절차상 필요한 사항이 있을 시에는 이를 보완하여야 한다.

바. 성과품 납품시기

1) 각종 심의, 심사, 협의 등 설계도서 납품 : 발주자와 협의

2) 실시설계도서 납품 : 실시설계 완료 후

사. 성과품의 소유

1) 본 용역 수행으로 인하여 생산된 각종 설계도서와 조사자료 등 일체의 성과품은 발주자의 소유로 하고 발주자의 승인 없이는 제3자에게 제공할 수 없으며, 본 과업 이외의 목적에 사용할 수 없다.

2) 본 용역 수행으로 생성된 성과품의 저작권은 본 용역계약이 완료된 날로부터  발주자의 소유로 한다.

3) 본 용역 수행에 있어 제3자 권리로 되어 있는 특허권, 지적재산권 등을 발주자의 동의 없이 사용하였을 경우 설계자가 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 져야 한다.

아. 설계자 유의사항

1)  본 과업지시서는 설계자 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 발주자 해석 및 의견에 따른다.

2) 과업 수행에는 필요하나 관련법규 및  과업지시서에 누락된 사항이 있는 경우에는 발주자와 협의 후 발주자 결정을 따르며, 누락된 사항의 시행에 필요한 비용은 설계자 부담으로 한다.

3) 설계 진행 시 제시한 공사비를 증가하지 않도록 계획하며, 부득이하게 증가시킬 경우에는 발주자와 협의 후 발주자 결정을 따르며, 이로인한 설계용역비 증가분은 설계자 부담으로 한다.

자. 관계기술자 협력

1) 「건축법시행령」 제91조의3(관계기술자와의 협력)과 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제3조(관계전문기술자의 협력사항) 규정에 해당하는 건축물에 대하여는 관계법령에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다. 다만, 건축구조의 경우에는 건축물의 규모와 관계없이 건축구조기술사가 건축물의 구조도, 구조계산서 등 구조 관련 서류를 작성하고 서명날인 하여야 한다.

2) 본 용역과업 수행 중 발주기관에서 추천하는 사천시 공공건축가의 자문 또는 협의를 하여야 하며, 협의 및 요청 내용에 대한 설계 반영사항을 날인 후 문서화하여 발주기관에 제출하여야 한다.

차. 참여기술자 변경

본 과업수행 시 과업 참여기술자의 퇴직 등 변경이 불가피하여 변경할 경우 사전에 발주처의 승인을 받아야하며, 사업수행능력 평가대상 기술자의 경우에는 평가당시 평가기준(배점기준) 동등이상의 기술자를 배치하여야 한다.

카. 설계의 기본방향

1) 설계 방향

가) 기본설계시 기본설계(안) 3안 이상 제안하여 발주자 승인(선정) 후 실시설계에 임한다.

나) 토지이용계획상의 현황을 참고하여 건축물의 배치, 규모, 구조형식 등을 계획한다.

다) 관리운영이 쉽고 운영비가 저렴한 에너지절약형 및 환경친화형으로 설계한다.

라) 장애물 없는 생활환경(Barrier Free) 우수등급 이상으로 예비인증을 취득(행정절차이행 포함)하여야 한다.

2) 미래지향적이고 친환경적 첨단 시설로 설계

가) 친환경적으로 설계하여야 한다.

나) 이용자 편의를 위한 설비와 구조로 구상되어야 한다.

다) 인터넷을 이용하여 선진국형 정보 네트워크를 구축하여야 한다.

라) 전기 및 정보통신분야(특히 LAN 분야 등)는 미래지향적인 기술기준을 적용하여야 한다.

마) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용하여야 한다.

바) 정보통신망은 네트워크의 물리적 보안성, 생존성, 확장성 등을 고려하여야 한다.

3) 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

가) 창호, 내외벽, 스라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계하여야 한다.

나) 전기 및 기계설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템으로 설계하여야 한다.

다) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 이용환경을 최적화하고 건물 용도와 실에 따른 적정 조도를 반영하여 설계하여야 한다.

라) 이용자의 편리성과 관리의 효율성이 확보되도록 설계하여야 한다.

마) 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법」, 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」, 「신·재생에너지설비의 지원 등에 관한 지침」,  「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」에 적합하게 신재생에너지 설비 설치 및 에너지절약계획서 작성하여야 한다.

4) 환경 친화적 부지환경 조성

가) 조경포장, 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우․오수계획 등 환경 친화적으로 설계하여야 한다.

5) 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

가) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

나) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

6) 안전성과 시공성이 확보된 설계

가) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태(사무 및 전시실용도 등)에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안전성이 확보되도록 설계하여야 한다.

나) 지반조사 보고서의 결과에 따라 합리적인 기초계획이 이루어진 설계를 하여야 한다.

7) 주요자재 사용계획

가) 시공자재는 지역의 우수제품을 활용할 수 있도록 설계하여야 한다.

나) 환경표지인증, GR마크인증 등의 친환경제품인증을 취득한 마감자재를 사용하여야 한다.

다) 국내 자재 중 KS제품 사용이 원칙이며, KS제품이 없을 경우 국내 자재 중에서 발주기관과 협의하여 선정하고 소방관계법에 의한 방염시설기준을 적용한 자재를 사용하여야 한다.

라) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

마) 조달청 우수제품 및 신기술제품은 우선적으로 설계에 반영(다만, 발주기관과 사전협의 후 적용)하여야 한다.

바) 설계도서에 특정업체의 제품을 명시할 수 없으며, 부득이 반영이 필요한 경우에는 감독공무원과 협의 후 진행하여야 한다.

타. 납품 이후 설계 하자 시

설계도서 상호간의 모순, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 관계법규 저촉

등으로 인하여 발생되는 설계변경 등 모든 사항에 대하여는 관계법령에

따라 설계자가 일체의 책임을 져야 하며, 그에 따른 수정된 도면 및 내역서, 수량산출서 등 필요한 자료를 작성하여 발주처에 제출하여야 한다.

파. 사천시 공공건축물 친환경건축물 가이드라인 적용

가) 투수성 포장 : 보도블럭 설치시 투수블럭 사용

나) 신재생에너지 : 태양광 발전장치 또는 지열장치 설치

다) 경관심의 : 건축협의 전 진행

라) 장애물 없는 생활환경 인증 : 우수등급 이상

마) 내진설계 적용 및 지진안전성 표시

6. 법령 등의 적용

가. 법령 등의 적용기준

설계자는 「건축법」, 「국토의계획및이용에관한법률」, 「소방법」,

「에너지이용합리화법」, 「전기사업법」, 「전기통신기본법」, 「정보

통신공사업법」, 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법」 및 기타

관련법규, 훈령, 예규, 고시, 조례 등에 적합하게 설계하여야 한다.

7. 설계용역 손해배상보험 또는 공제 가입

가. 수급인은 본 용역 업무를 수행함에 있어 고의 또는 과실로 당해 용역 목적물  또는 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우에 대비하여 이의 배상을 담보하는 보험 또는 공제에 가입하여야 한다.

나. 보험 또는 공제증서는 용역을 완료하기 전에 제출하여야 한다.

다. 기타 보험 또는 공제가입에 따른 세부사항은 국토교통부 고시 제2015-762호 「설계․건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령」의 기준에 따른다.

8. 계약의 해지

가. 계약의 해지는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「용역계약일반조건」에 의하되, 다음의 경우에도 계약을 해지할 수 있다.

1) 설계 납품이 지연되거나 설계이행이 불가능하다고 인정될 때

2) 감독공무원의 지시에 불응하여 설계를 진행할 때

3) 부득이한 사유로 본 공사 건설계획을 중단할 때

4) 기타 계약조건을 위반할 때

제2장 설계 진행사항

1. 설계도서 작성

가. 일반사항

설계도서의 작성방법은 발주자가 정하는 소정양식에 의하고, 설계도서 작성중 이의가 있을 때에는 반드시 감독공무원과 협의한 후 후속작업을 진행하여야 한다.

나. 작성지침

1) 「건설기술 진흥법」 제48조(설계도서의 작성 등), 「건설기술진흥법시행규칙」 제40조(설계도서의 작성), 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」, 기타 관련법규에 의한다.

2) 예정공정표는 네트워크방식으로 작성하여 제출한다.

3) 설계내역서 작성은 조달청 전산표준 호환텍스트파일(확장자*.TXT) 및 Microsoft Excel (2002)과 호환되도록 작성하며, 일위대가는 표준품셈을 적용 산출하여 작성한다.

4) 단가 적용은 기획재정부에 등록한 전문가격조사기관이 조사하여 공표한 가격 3개 이상 조사하여 단가조사표를 작성한 후 최저 가격을 적용하여 산정하고, 단가산정이 불가능한 경우는 동일항목에 대하여 견적을 2개소 이상 제출받아 이를 적용하여 내역서를 작성 한다.

5) 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리하고 발주 단위별(건축+토목+조경+기계설비, 전기, 통신, 소방)로 설계도서를 작성하여야 하며, 관급자재는 발주청이 직접 구매할 수 있도록 분리작성 하여야 한다.

6) 공사시방서는 표준시방서를 작성하고, 특수 공종이 발생하거나 특수한 현장조건에 따라 표준시방서의 추가, 수정, 삭제를 할 필요가 있을 때 특별시방서를 작성한다. 표준시방서는 국토교통부에서 고시하는 각 공사분야별 표준시방서를 기준으로 작성하고, 특별시방서는 자재 관련 시방(각종기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준, KS규격품 등)과 도면에 표시가 힘든 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 시험방법, 시공방법, 주의사항 등을 기술한다.

7) 기타 설계서의 작성기준은 감독공무원의 지시에 의한다.

2. 설계진행시 제출서류

수급인은 계약 체결 후 7일 이내에 작업에 착수해야 하며, 착수 전에 아래의 서류를 제출하여야 한다.

가. 착수

설계자는 용역 착수 시 다음의 제반서류(이하 “착수계”라 한다.) 2부를 제출하여야 한다.

1) 착수계

2) 책임기술자 선임계(서식3)

※기술경력증명서 1부 첨부

3) 설계용역 참여기술자 현황 및 투입계획서(서식4)

(총괄책임기술자, 분야별 책임기술자, 분야별 참여기술자로 구분하여 기재하며, 소속(업체명), 업무내용(분야), 성명, 주민번호 앞자리, 등급, 자격증, 참여예상기간 등 기재한다.)

※참여기술자는 관련법 규정에 적합한 자격요건 이상을 갖춘 자 이여야 함.

4) 설계용역수행 조직표

5) 설계용역 예정공정표(서식5)

6) 낙찰금액에 대한 산출내역서

7) 과업지시서

8) 하도급 예정현황

9) 보안각서(서식1)

10) 손해보험가입증서 또는 공제증서(용역 준공시 제출가능)

11) 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 사항

3. 보고 및 회의 등

설계자는 정기적으로 진행사항을 보고하여야 하며, 주요공법, 자재선정 등 모든 설계과정에서 감독공무원과 협의를 통하여 발주자가 의도하는 사항이 충분히 반영되도록 한다.

가. 기초조사 보고 : 착수일로부터 20일 이내

1) 제출서류

가) 지장물건 조사도(도면첨부), 지반조사보고서 : 각2부

나) 건축법규 등 관계법령 검토서 : 각2부

나. 기본설계(안) 보고 : 착수일로부터 60일 이내(3개안 이상 제출)

다. 실시설계 보고 : 착수일로부터 120일 이내

라. 수시보고 : 기타 발주자가 필요하다고 요구할 시

마. 월간업무보고 : 월간 업무수행사항 및 예정사항 등을 작성 제출(서식2)

바. 용역보고회 개최(필요시)

발주청이 업무추진 계획에 따라 용역보고회 개최를 요청할 시에는 용역 책임자는 관련 자료를 작성하여 보고에 성실히 응하여야 한다.

※ 중간보고 및 최종보고시 3D 시뮬레이션 등을 이용하여 보고

사. 업무 회의

1) 일반사항

가) 설계자는 설계진행과 관련하여 발주자와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 발주자는 설계자에게 설계 중 이행이 완성된 부분의 설계도서를 제출․요구하여 수정․보완 지시할 수 있으며, 설계자는 정당한 사유 없이 이를 거절할 수 없다.

다) 설계자는 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료를 작성하여 회의에 참석하여야 한다.

2) 업무 착수회의

가) 착수일로부터 2주 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

나) 업무 착수회의 시 책임기술자는 설계 진행계획을 설명하여야 한다.

3) 수시 회의

발주자 요구시 또는 문제점 발생시 회의에 필요한 자료를 작성하여 회의에 참석하여야 한다.

아. 감독

1) 수급인은 우리시에서 임명하는 감독공무원의 지시를 받아서 본 과업을 수행하여야 한다.

2) 과업 지시내용 및 계약서상 내용이 상충되거나 의문이 있을 경우 감독공무원의 지시에 따른다.

3) 감독공무원은 과업 수행 중 용역대리인이나 수급인이 과업수행에 부적당 하다고 인정될 때에는 즉시 교체를 명할 수 있으며, 수급인은 지체없이 이를 이행하여야 한다.

자. 용역비 변경 및 정산

1) 용역비는 설계 확정후 실시설계 납품시, 예산내역서 상의 공사비가 증가하여도 추가지급 할 수 없다. 다만 동 과업수행 중 다른 법령 및 기타 사유에 의거 특별히 필요하다고 인정하여 설계변경 지시하는 경우 예산의 범위내에서 지급할 수 있다.[용역과정에서 발생하는 제비용(각종보고자료 작성 등)은 도급자 부담을 원칙으로 한다.]

2) 설계용역자는 설계 납품완료 이후라도 설계용역비가 과다, 누락, 오류 등으로 인하여 과다 계상 되었다고 인정되어 발주기관의 변상조치 요구 시에는 즉시 이를 이행하여야 한다. 이에 설계용역자는 민․형사상 소를 제기할 수 없다.

제3장 분야별 설계

1. 일반사항

가. 관계법령 및 규정에 적합하고, 주변 환경  등에 조화를 이루며 이용자의 접근성 및 편의성을 고려하고, 누구나 이용이 편리하도록 계획하여야 한다.

나. 각종 편의시설 및 위생시설(화장실)은 장애인을 포함한 모든 사용자가 편리하게 사용할 수 있도록 계획하여야 하며, 「장애인․노인․임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률」, 「장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙」에 적합하게 편의시설을 설계하여야 하며, 장애물 없는 생활환경(Barrier Free) “우수등급” 이상으로 예비인증 취득(행정절차이행 포함)하여야 한다.

다. 친환경․에너지 절약형 건축물을 지향하여 주변환경과 조화를 이루면서 건물에너지 효율을 높인 환경 및 자연친화적인 건축계획으로 저탄소 녹색성장을 구현하여야 하며, 「녹색건축 조성지원법」, 「녹색건축 인증에 관한 규칙」에 적합하여야 한다.

라.「신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급촉진법」, 「녹색건축 조성지원법」, 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」 등에 적합하게 설계하여야 한다.

마. 본부지 측량(현황, 경계), 지질조사, 각종 심의, 위원회, 협의, 심사, 감사 등은 업무범위에 포함되며, 소요비용은 설계용역비에 포함된 것으로 별도 비용 지급은 없다.

2. 사전조사에 관한 사항

가. 지장물 조사

1) 지장물 조사는 계획선 내의 토지, 도로, 가옥, 공작물, 통신 및 송배전 시설 등 일체의 보상 물건에 대하여 토지대장 및 건축물대장들의 관련공부를 기준으로 구 물건을 현지답사 확인하여 건수별로 조사를 시행하며, 현재의 이용 상황 등을 상세히 조사 하여야 한다.

2) 지장물도에는 건축물, 공공시설, 하수도, 가로수, 한전, 통신주 및 지하선로 가드레일, 상수도, 교통표지판, 지하철 등 공사구간내의 각종 구조물을 상세히 명시하고 별도 조서를 작성 제출한다.

3) 지장물건조서는 물건별 사진을 촬영하여 조사원본에 첨부하여 납품하고 인·허가 서류에 필요한 국·공유지용지조서, 도면 등을 별도 작성하여야 한다.

나. 지반(지질) 조사

1) 본 과업내용서에 의거 조사하며 과업내용에 명기되지 않은 사항은 토질 및 암석시험규정, 한국산업규역 및 기타 관련규정에 따라 시행하여야 한다.

2) 시추 및 현장시험 광경은 공법과 시험 종목을 표시한 후 천연색 사진으로 촬영하여 앨범에 정리하여 제출한다.

3) 지질조사의 내용을 반영하여 최적의 기초설계 및 흙막이설계, 굴토계획 등을 수립하여야 한다.

4) 사업부지 내 지장수목이 있을 경우에는 활용계획을 수립하여야 한다.

다. 배수시설 조사

1) 암거 및 배수 구조물의 위치를 선정, 홍수량과 홍수위를 추정하고 구조물의 규격을 결정하며, 노면배수와 횡단배수 처리를 원활하게 하여야 한다.

2) 계획 대지 주위의 하수처리시설을 조사한다.

라. 표토 및 지장수목조사

1) 식재지반조성을 위한 표토를 조경기술자와 사전에 협의하여 표토의 수집과 보관을 위한 계획을 수립한다.

2) 사업부지 내 지장수목이 있을 경우에는 활용계획을 수립하여야 한다.

3. 건축분야

가. 건축 기본 방향

1) 건축물은 디자인 중심이 아닌 실용성에 중점을 두고 계획하며, 과도한 장식과 불필요한 벽체부착물 등 실제 기능에 상관없이 공사비 상승에 영향을 주는 입면재료는 가급적 배제하도록 한다.

2) 토지이용계획상의 상황을 파악하여 건축물의 배치, 규모, 구조형식 등이 최적화 될 수 있도록 계획한다.

3) 건축물은 유지관리가 용이하도록 하고, 에너지 절약효과를 극대화할 수 있도록 커튼월 설계는 지양하는 등 경제적인 설계를 하여야 한다.

4) 건축자재는 인체에 유해하지 않은 친환경 자재를 사용하여야 한다.

5) 주변 경관을 고려하여 건물의 배치, 형태 등은 주변 환경과 조화를 이루는 자연 및 환경 친화적인 계획으로 한다.

나. 주요시설

1) 본 공공청사는 용현면 농촌중심지 활성화사업과 통합추진되는 복합청사로 1~2층은 행정복지센터, 3층은 오동지교류센터로 층간구획하여 설계하여야 하며, 전기, 통신, 소방 등이 분리될 수 있도록 설계하여야 한다.

2) 공간 활용이 잘 되도록 하여야하며, 소모임 위주로 계획하도록 한다.

※ 층수, 용도, 면적 등 세부사항은 기본설계를 통해 발주청과 협의 조정

다. 구조계획

1) 「건축법」, 「건축물의 구조 기준 등에 관한 규칙」, 「건축물의 하중기준」 및 기타 건축구조 관련 규정에 적합하게 하여야 한다.

2) 내진 설계로 구조계획하고, 건축물의 규모와 관계없이 건축구조기술사가 건축물의 구조도, 구조계산서 등 구조 관련 서류를 작성하고 서명날인 하여야 한다.

4. 설비분야

가. 일반 고려사항

1) 초기투자비, 운전경비 및 유지관리비를 최소화 할 수 있는 설비방식으로 계획한다.

2) 보수 및 유지관리가 용이하여야 하며, 장래 증설이나 변경 및 개․보수에 대한 융통성이 있도록 계획한다.

3) 기계, 전기, 통신, 소방 등 설비 각 분야 간의 긴밀한 협조 하에 건축물 각 요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 계획한다.

4) 자동화 운전관리를 통하여, 업무효율의 극대화 및 인력 절감을 꾀할 수 있도록 계획한다.

5) 에너지 및 수자원 절약을 극대화 할 수 있는 최적의 설비방식을 추구한다.

6) 화재, 수재 등 비상 상황에 대응할 수 있도록 계획한다.

7) 기계실 및 전기실에는 적정한 크기의 장비 반입구를 계획한다.

8) 사무실 및 디지털자료실의 전기, 전화, OA설비는 Inner Box를 바닥에 매립하여 필요시 인출하여 사용토록 계획한다.

9) 엘리베이터는 「승강기시설 안전관리법」규정에 적합하게 설치하고 장애인의 사용에 불편이 없어야 한다.

나. 에너지, 열원 설비

1) 신재생에너지 사용을 적극 고려하여 계획을 수립한다.

2) 고효율 기자재의 사용을 비롯한 에너지를 절감할 수 있는 건축기법을 반영한다.

3)「건축물의 에너지절약 설계기준」, 「공공기관 에너지절약 추진지침」,「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」 등 정부의 에너지절약 정책과 환경오염 관련정책을 적극 수용하여 환경친화적인 건축물 되도록 설계한다.

4) 재생에너지 설비(태양광, 지열, 태양열, 연료전지 등)의 방식 적용에 대하여 발주기관과 사전 협의 진행한다

※ 신재생에너지설비 설치 : 연도별 신·재생에너지 공급 의무 비율 준수

신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령(제15조제1항제1호 관련)
해당연도	2011～2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020이후
공급의무비율(%)	10	11	12	15	18	21	24	27	30

다. 냉․난방 공조 설비

1) 각 실별 부하 조건을 고려하여 에너지절약형 설비방식으로 계획한다.

2) 기계실 장비 및 기기는 적정하게 배치되도록 계획한다.

3) 전관에 냉난방설비를 완비하여야 하며, 개별 냉․난방 방식을 적용하고 사무실에서 실별 제어가 가능한 시스템으로 구축하여 에너지 절약을 위한 설계를 하여야 한다.

라. 위생설비

1) 내구성, 수두압 등을 감안하여 재질이나 규격을 선정한다.

2) 배관 경로가 전기실, 배전실 등을 통과하지 않도록 계획한다.

마. 소방설비

1) 화재발생 시 초기진압이 가능하고, 연기확산을 최소화하도록 계획한다.

2) 유사시 인명피해를 최소화하고 건물의 안전성을 확보할 수 있도록 계획한다.

3) 각 실의 용도별 소방설비 기준에 적합하도록 계획한다.

바. 환기설비

1) 각 실별로 적절한 환기방법을 검토하여 계획한다.

2) 화장실 등 환기가 많이 요구되는 시설은 외기와 접할 수 있도록 배치하고 악취가 비산되지 않도록 자연환기와 강제 배기를 병행 가능하도록 검토 설계한다.

5. 토목․조경분야

가. 토목분야

1) 건축물 부대토공사(주-터파기)이므로 건축계획과 공사부지의 지형, 토질, 암반 상태, 지하구조물 등 현장을 철저히 분석 조사․검토하여 구조계산에 반영하고 최소한의 물량 산출 및 경비를 산정한다.

2) 일반 토목 설계 법규 및 지침 등을 준수하여 설계에 반영하고, 토공사로 인하여 주변건축물 및 시설물에 대한 피해가 발생되지 않도록 주변현황을 철저히 조사하여 안전성을 검토 후 이에 대한 조치를 전문기술자가 확인하고 설계에 반영하여 안전한 설계가 되도록 한다.

3) 현장 상황에 부합되고 현실적으로 사용되는 토목 공종, 장비 및 자재 선정 등으로 적정한 품질확보와 경제적 설계가 되도록 한다.

4) 상수도 분기 예상지점의 관경 및 수압, 하수도 계획 수량을 충분히 고려하여 설계되어야 한다.

5) 지하굴착 깊이 5m이상되는 부분의 토공설계는 토공사로 인한 위해방지 대책을 수립한다.

나. 조경분야

1) 조경은 건축법에서 요구하는 대지안의 조경기준 등 조경공사 설계에 적용되는 관련법규 및 제반 규정을 준수하여 작성 한다.

2) 조경은 대상지의 환경을 고려하여 차음, 차폐, 경관 등 기능적 측면의 디자인 요소를 반영하며 주변 환경과 조화를 이루는 계획을 하여야 한다.

3) 외부공간은 이용자의 정서함양, 휴식, 만남의 장소 등 다양한 옥외활동이 가능한 친숙하고 편리한 공간으로 구성하며 충분한 휴식공간과 녹지를 확보하여 조성한다.

6. 전기분야

가. 일반 고려사항

1) 초기투자비 및 유지관리비를 최소화 할 수 있는 설비방식으로 계획한다.

2) 보수 및 유지관리가 용이하여야 하며, 장래 증설이나 변경 및 개․보수에 대한 융통성이  있도록 계획한다.

3) 기계, 전기, 통신, 소방 등 설비 각 분야 간의 긴밀한 협조 하에 건축물 각 요소가  서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 계획한다.

4) 화재, 수재 등 비상 상황에 대응할 수 있도록 계획한다.

5) 기계실 및 전기실에는 적정한 크기의 장비 반입구를 계획한다.

6) 사무실 및 디지털자료실의 전기, 전화, OA설비는 Inner Box를 바닥에 매립하여  필요시 인출하여 사용토록 계획한다.

7) 전기설비는 미래지향적인 기술을 적용하며, 최근 개정된 법령 중 전기(소방)에 해당하는 기술기준을 적용한다.

나. 에너지, 열원 설비

1) 신재생에너지 사용을 적극 고려하여 계획을 수립한다.

2) 고효율 기자재의 사용을 비롯한 에너지를 절감할 수 있는 건축기법을 반영한다.

3)「건축물의에너지절약설계기준」,「공공기관에너지절약추진지침」,「공공기관에너지이용합리화추진에관한규정」등 정부의 에너지절약 정책과 환경오염 관련정책을 적극 수용하여 환경친화적인 건축물 되도록  설계한다.

다. 수변전, 동력 및 전열설비

1) 부하의 설비용량 산출을 정확히 하여야 하며 적정 수용률, 부등률을 적용한다.

2) 수배전실의 규모 및 배치의 적정을 기하여한다.

3) 전기설비기술 기준령에 적합한 접지방법으로 설계하여야 한다.

4) 콘센트의 설치 높이 및 위치를 적정하게 설계하고 용도에 알맞는 전압을 선정하여 콘센트를  설치한다.

7. 통신분야

가. 일반 고려사항

1) 초기투자비 및 유지관리비를 최소화 할 수 있는 설비방식으로 계획한다.

2) 보수 및 유지관리가 용이하여야 하며, 장래 증설이나 변경 및 개․보수에 대한 융통성이  있도록 계획한다.

3) 기계, 전기, 통신, 소방 등 설비 각 분야 간의 긴밀한 협조 하에 건축물 각 요소가  서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 계획한다.

4) 본 설계는 정보통신설비의 시공관련 설계기준을 제공하여 설계업무 표준화와 효율을 지향하고 운용 및 확장이 용이하도록 하여야 하며 초고속 정보통신망을 접속할 수 있도록 설계되어야 한다.

5) 시설 및 사무실의 수요를 감안하여 미래지향적인 충분한 용량을 확보 하여야 한다.

6) 유지관리 방법과 비용을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

7) 최근 개정된 법령 중 관련법규(정보통신, 방송, 소방 등)에 해당하는 기술기준을 적용한다.

8) 정보통신설비 구축은 TTA표준(한국정보통신기술협회), KICI(한국정보통신산업연구원) 설계기준 등을 준용한다.

9) 네트워크를 구성하는 광케이블(광점퍼코드)는 광신호 태핑(Tapping)에 의한 해킹으로부터 보호되어야 한다.

제4장 설계도서 납품목록

1. 성과품의 작성

가. 실시설계보고서(설계설명서)

1) 보고서에 참여기술자 명단을 수록한다.

2) 보고서에 사업개요, 대지현황분석, 배치계획, 분야별 계획(건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방)이 포함되도록 한다.

3) 발주처의 지시사항, 각종 회의록, 설계자문회의 검토사항, 건설기술심의 지적사항 등에 대하여 내용, 조치 또는 설계반영 내용 등을 정리하여 보고서에 부록으로 삽입한다.

나. 구조계산서

1) 구조계산서는 계산내용이 알기 쉬우며 정확하고 상세하게 정리되어 검토가 용이하게 작성되어야 한다. 특히 프로그램의 입․출력 자료는 모든 Case 별로 이해하기 쉽게 정리되어 구조계산서에 포함되어야 한다.

2) 계산에 사용된 프로그램명과 이를 이용하여 설계한 사항 또는 부재 등을 정리하여 수록한다.

3) 전산프로그램의 출력자료는 구조계산서의 부록으로 별책 작성한다. 출력자료가 구조계산서의 형태 및 순서로 정리되어 인쇄된 경우에는 발주처와 협의 후 본 구조계산서의 해당항목에 수록한다.

4) 구조계산서의 각 페이지 우측 상단에 작성자와 검토자, 확인자란을 만들어 계산의 적정여부를 확인 후 서명토록 한다.

5) 구조계산 시 주요 설계계수가 가정값인 경우 반드시 가정값임을 표시한다.

다. 설계도면

1) 설계도면은 이해가 쉽도록 작성한다.

2) 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용)과 아라비아숫자를 사용하여 작성한다.

3) 도면 하단의 표제란의 형식은 발주처와 협의하여 결정한다.

4) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

5) 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도, 주요설계조건, 시공 시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

6) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련 있는 도면들의 번호 및 도면명을 표기한다.

7) 모든 도면은 CAD 시스템을 이용하여 작성하고 결과를 USB에 담아 제출한다.

라. 공사시방서

1) 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 등을 근간으로 발주처 및 설계자의 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

2) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

① 적용범위, 용어정의, 설계도서의 적용우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세사항

② 해당 공사 표준시방서, 전문시방서, 관련법규 및 지침 제기준 명칭

③ 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

④ 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항

⑤ 시공자가 작성하여야 할 시공상세도 목록

⑥ 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항

⑦ 발주처, 수급인, 시공자 사이의 책임범위 및 한계

⑧ 각종검사, 설계변경 등에 대한 절차, 방법, 시기

⑨ 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세사항

⑩ 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정

⑪ 공사전반에 관한 주의사항 및 절차

⑫ 기타 주요공사 사항

3) 공사시방서 작성 시 유의사항

① 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

② 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

③ 표준양식을 사용하도록 하고, 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

④ 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

⑤ 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

⑥ 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

⑦ 공사기성에 관련된 사항은 이해가 명확하도록 한다.

⑧ 발주처의 의도를 정확히 파악하고, 발주처의 감독, 수급인, 감리자 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

⑨ 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

라) 공사시방서 작성 시 국토교통부 제정 표준시방서 및 서울특별시 제정 전문 시방서를 기준으로 작성하여야 한다.

마. 설계예산서

1) 설계예산서는 설계내역서, 일위대가표, 단가산출서로 구별하여 작성한다.

2) 설계예산서에는 총공사비와 공사개요를 기재한다.

3) 총괄내역서에는 제경비 산출근거가 포함되어야 한다.

4) 노임기준은 당해연도 공사노임단가(대한건설협회)를 기준으로 한다.

5) 재료비는 정부구매물자 가격정보를 포함하여 3개 이상의 물가정보지를 참조하여 산출한다.

6) 품셈은 당해연도 건설공사 표준품셈에 준한다.

7) 중기손료 작성 시의 외환환율은 해당년도 1월 3일자 기준 외국환거래법에 의한 기준환율(매매기준율)을 기준으로 한다.

8) 공사비 산출을 위한 견적서는 3개 업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 발주처와 상의하여 1∼2개 업체 이상의 견적서를 기준으로 적용할 수 있다.

9) 설계예산서는 회계예규「지방자치단체 원가계산 및 예정가격작성요령」에 의거 작성한다.

바. 인․허가 도서

1) 관계법규에 따라 과업범위에 포함되어 있는 제반 인․허가 요청용 도서를 작성한다.

사. 기  타

1) 수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 의한다.

2) 도면의 크기는 KS A 5201의 A0∼A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

3) 모든 보고서, 계산서, 시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 하며, 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

아. 성과품의 납품

1) 성과품의 종류와 납품 부수는 별표1에 따르되, 최종 납품 시 발주처와 협의하여 조정한다.

사. 성과품 납품시기

1) 성과품의 납품은 기본설계 납품, 실시설계 도면납품, 실시설계 최종납품으로 구분한다.

① 기본설계 도면납품: 착수일로부터 30일 이내

② 실시설계 최종납품: 착수일로부터 120일 이내

2) 수급인은 경관 및 건축심의 등 필요에 따라 실시하는 심의 및 협의에 필요한 도면 및 서류를 최소 10일전까지 제출하여야 하며, 최종성과품은 과업수행 종료일에 납품하여야 한다.

2. 기본설계 납품도서

구 분	목 록	규 격	수 량	단 위	비 고
1	기본설계보고서	A4	3	부
4	설계도면	A3	3	부	배치도(주차, 포장, 식재 포함), 각층 평면도, 입면도(2면 이상), 종·횡단면도
5	색채계획서	A4	3	부
6	조감도	A2	2	조
7	USB메모리		3	개

주) 1. 납품도서는 감독공무원과 협의하여 조정될 수 있음.

2. 기본설계보고서 포함사항(공사개요, 건축물 규모, 분야별 설계설명서(기계, 전기, 통신계획개요서 포함), 개략공사비, 법규검토서, 향후 실시설계 방향 등)

3. 실시설계 납품도서

구 분	목 록	규 격	수 량	단 위	비 고
1	종합보고서	A4	3	부
2	설계설명서	A4	3	부
3	설계도면	A3	5	부	반책 3부
4	계산서	A4	5	부
5	내역서	A4	5	부
6	일위대가	A4	5	부
7	단가산출서	A4	5	부	견적서 포함
8	수량산출서	A4	5	부
9	주요자재결정서	A4	5	부
10	주요자재사양서	A4	5	부
11	시방서(표준, 특별)	A4	5	부
12	조감도	A2	2	조	액자 포함
13	공사예정공정표	A3	3	부
14	USB메모리		3	개
15	기타 발주처 요구사항				필요시

주) 1. 종합보고서에는 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4규격의 책자로 양면인쇄하고 무선무사철로 좌철하여야 한다.

2. 공사예정공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT

/CPM에 의한 Network 공정표를 정확하게 작성․제출하여야 한다.

3. 납품수량 등은 발주자 필요시 추가납품을 요구할 수 있으며, 기타 자세한 사항은 감독공무원과 별도 협의한다.

4. 기타 공사에 필요한 보고서는 별도로 납품하여야 한다.

〔서식 1〕 보안각서

보  안  각  서

1. 용 역 명 :

2. 계약일자 :

3. 착수일자 :

4. 준공예정일 :

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요시설임을 인식하고 과업수행중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제14장 용역계약일반조건 제9절 2호(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

4. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 건설기술용역계약특수조건 제12조(저작권 및 소유권)에 의거 발주청에게 귀속됨을 알고 별도로 발주청의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2019.    .     .

주    소 :

생년월일 :

기술분야 :

성    명 :           (인)

사천시장 귀하

〔서식 2〕 월간업무보고

월 간 업 무 보 고

□ 용역개요

□ 용 역 명 :

□ 용역기간 : 2019년  월  일 ～ 2019년  월  일

□ 계약금액 : ○○○원

□ 00월 용역업무보고(공정률 00%)

구분	금월 추진 사항	익월 추진 예정 사항	비고
첫째주
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주

책임기술자 :           (인)

사천시장 귀하

〔서식 3〕 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자  선 임 계

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 2019.   .   .

4. 착수일자 : 2019.   .   .

5. 준공예정일 : 2019.   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2019.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

사 천 시 장  귀하

〔서식 4〕 설계용역 참여기술자 현황

설계용역 참여기술자 현황

○ 용 역 명 :

○ 용역기간 :

분야별	참여 기술자
	소속업체명	참여업무 내 용	참여기간	성 명	자격명	자격증번호	서명 (날인)

〔서식 5〕 설계 예정공정표

설계 예정공정표(예시)

구 분	착수일로부터 4개월												비고
	20일		40일		60일		80일		100일		120일
1. 현황조사 및 측량
2. 지반조사
3. 기본설계
4. 실시설계
5. 각종 심의, 협의 등 (경관, 기술자문, 건축협의, 각종 인증, 심사, 감사 등)													행정절차 이행 소요기간은 용역정지 또는 기간연장
6. 기 타