소하천 정비 사업	하천담당

◦ 소하천 미개수 구간 정비로 집중호우시 농경지 피해 예방

□ 사업개요

◦ 위    치 : 곤양면, 정동면, 사천읍 일원(상촌, 학촌, 목곡)

◦ 사업기간 : 2015년 ~ 2017년(3년간)

◦ 사 업 비 : 7,400백만원(국비 50%, 시비 50%)

◦ 사 업 량 : 소하천정비 3개소 L=4.2km

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2015년 까지	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,400	2,480	2,320	2,600	0	0
상촌	2,200	2,200
학촌	2,200	280	1,920
목곡	3,000		400	2,600

□ 소하천별 추진사항

◦ 상촌소하천

- 2013. 12.  ~ 2014. 03. : 실시설계용역 완료

- 2014. 05.  : 보상협의 착수

- 2015. 02.  : 공사 착공

- 2015. 06.  : 보상(수용재결) 완료

◦ 학촌소하천

- 2014. 11.  ~ 2015. 06.  : 실시설계용역 완료

- 2015. 04.  : 전략(소규모)환경영향평가 용역 착수

◦ 목곡소하천

- 2015. 03.  : 2016년도 사업신청(신규 반영 예정)

□ 소하천별 추진계획

◦ 상촌소하천

- 2016. 08.  : 공사 준공

◦ 학촌소하천

- 2015. 11.  : 보상협의 착수

- 2016. 02.  : 공사 착공

◦ 목곡소하천

- 2016. 01.  : 실시설계용역 착수

지방하천 정비 사업	하천담당

◦ 하천 미 개수 구간 정비로 집중호우 시 농경지 피해 예방

◦ 낭만이 있고 살아 숨쉬는 하천 만들기 사업 추진

□ 사업개요

◦ 위    치 : 곤양면, 축동면, 서포면 일원(목단, 묵곡, 구평,)

◦ 사업기간 : 2014 ~ 2019년

◦ 사 업 비 : 41,295백만원

※ 목단(국비 60%, 시비 40%), 묵곡, 구평(국비 50%, 도비 50%)

◦ 사 업 량 : 하천정비 4개소 L=5.9km

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2015년 까지	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
계	41,295	11,966	21,853	2,500	4,976
목단	7,540	7,166	374
묵곡	24,279	4,800	19,479
구평	9,476		2,000	2,500	4,976

□ 하천별 추진사항

◦ 목단천(시 시행)

- 2013. 12. : 실시설계용역 완료

- 2015. 02. : 공사 착공

◦ 묵곡천(도 시행)

- 2015. 08. : 실시설계용역 완료

◦ 구평천(도 시행)

- 2015. 03. : 2016년도 사업신청(신규 반영 예정)

□ 하천별 추진계획

◦ 목단천(시 시행)

- 2016. 06. : 공사 준공

◦ 묵곡천(도 시행)

- 2016. 01. : 보상협의 및 공사 착공

◦ 구평천(도 시행)

- 2016. 01. : 실시설계용역 착수