스마트도시 방재시스템 구축

관리번호		2-2		주관부서		재난안전과(재난행정팀)
완료시기		사업성격		예산구분		추진현황					이행율 (%)
임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	완료		추진중		미착수
						종료	지속추진	정상	부진
○		○		○				○			65

◦ 자연마을 무선방송시스템, 재난예경보 시설 통합으로 신속한 대응체계 구축

◦ 스마트시티 통합플랫폼 및 5대 연계서비스 도입을 통한 골든타임 확보

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사천시 전역

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년

◦ 사 업 량

- 재난 예경보시스템 통합, 자연마을 원격제어 무선방송 시스템구축

- 스마트시티 통합플랫폼 기반구축(공모사업), 복합재난방재 기본계획수립 용역

◦ 사업내용

- 재난 예경보 시설 통합(9종82대), 복합재난방재 기본계획수립

- 무선마을방송(35개마을) 스마트시티 통합플랫폼 및 5대 연계서비스 도입

◦ 사 업 비(투자계획) : 1,916백만원

(단위 : 백만원)

구 분	총액	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월	임기후
계	1,916		166	550	1,200
국 비	600				600
도 비
시 비	1,316		166	550	600
민자 등

단위사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월
추진율(누계)	15%	70%	100%	100%
재난예경보시스템 통합	준공완료	운영
자연마을 원격제어 무선방송 시스템	계획수립	설계 및 사업추진	운영
복합재난방재 기본계획수립		설계 및 사업추진	운영
스마트시티 통합플랫폼 기반구축 (공모사업)		계획수립	공모	운영

□ 연도별 달성목표

□ 추진실적

◦ 2019. 1. 28. : 재난예경보 시설 통합관리시스템 준공

◦ 2019. 1. 29. : 자연마을 원격제어 무선방송시스템 설치계획 보고

◦ 2019. 2. 12. : 2019년 스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업 공모신청서 제출

◦ 2019. 2. 18. ~ 2. 28. : 자연마을 원격제어 무선방송시스템 신청 대상지 현장 조사

◦ 2019. 3. 19. : 자연마을 원격제어 무선방송시스템 신청 대상지 현장조사 결과 보고

◦ 2019. 6.  1. : 자연마을 원격제어 무선방송시스템 사업시행

◦ 2019. 6. 26. : (회계과) 자연마을 원격제어 무선방송시스템 사업 조달계약의뢰

◦ 2019. 9.  9. : (준공) 자연마을 원격제어 무선방송시스템 사업

□ 향후 추진계획

◦ 2019. 9.~10. : 자연마을 무선방송시스템 프리앱프 추가 설치(24개마을)

◦ 2020. 1.~12. : 스마트시티 기본계획(복합재난 방재 기본계획 사업 포함)

◦ 2020. 2월중 : 2020년 스마트시티 통합플랫폼 기반구축사업 공모신청서 제출

□ 문제점 및 대책

◦ 문제점

- 스마트시티 조성 관련 업무 관련 부서별 추진 : 정보통신과, 재난안전과, 도시재생과

◦ 대  책

- 스마트시티 조성 업무 통합으로 예산 중복 투자 사전 차단

- 추진 전담팀 신설 : “스마트시티팀”

- 재난안전과-14495(2019. 8.9.) 스마트시티 조성 업무 통합추진 건의와 관련임